문서번호	설비부-26286
결재일자	2022. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도로설비과장		설비부장
박근형		문학준		07/19
				김호성
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2022. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 현장여건 변경 및 유관기관 요청사항 등에 대한 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

○ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로확폭(L=582m)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	******	**	**************************	***********
		**	**************************	**********
		**	*************************	***********

○ *********************************

2		관련근거

○ 서부도로사업소 설비분야 협의 [('21.06.11.)] : 라디오재방송설비 송신방식 변경 필요

○ 통신공사 실정보고 사항에 대한 검토 보고 [제2자유입건 제2022-239호 ('22.07.14.)]

3		검토내용

○ 라디오재방송설비 송신방식 변경(안테나 방식 → 누설동축케이블 방식)

- 서부도로사업소 협의사항을 반영하여, 유지관리 용이성 및 설비 통일성을 위해 서부도로사업소에서 관리중인 지하차도 라디오재방송설비 송식방식인 누설동축케이블 방식으로 변경 필요함.

○ 기타 통신공사 변경내용

- 지하차도 내부 CCTV 설치 간격이 120m로, 최대 관제범위 60m를 초과하므로, 사각지대 방지하고 사고 발생시 신속대응을 위한 CCTV 2대 추가 설치 필요함.

○ 주요 변경내역

공종	주요 변경내역						직접비 (단위:천원)
	품명	규격	단위	당초	변경	증·감
**** ****	****	*****	*	*****	*****	**	**********
	********	*******	*	*****	*****	**
	***** *****	****	*	**	**	**
	********	************	*	***	***	***
	***	***********	*	**	*	**
	******	****************	*	**	**	**
*** *** ****	******	****	*	*	*	**	**********
	************	****	*	*	*	**
	*********	******* ****	*	*	*	**
	****** *****	******	*	*	*	**
	********	*************	*	*	*	**
	********	*******	*	*		**
	********* *****	******** **********	*	*	*	**
	********	*************	*	*	*	*
	********	*******	*	*	*	**
	********* *****	******** **********	*	*	*	**
	********* *****	******** **********	*	*	*	**
	*********	*********	*	*	*	**
	*********	***	*	*	*	**
	***********	***	*	*	*	**

공종	주요 변경내역						직접비 (단위:천원)
	품명	규격	단위	당초	변경	증·감
*** *** ****	*********	****	*	*	*	**
	********	*******	*	*	*	**
	******	********	*	*	*	**
	********	*********	*	*	*	**
	****** *****	************	***	*	*	**
	****	*****	*	***	*	****
	******	****	*	*	*	**
	*****	*********	*	***	***	***
	*********	*********	*	**	**	**
	*********	*******	*	*****	*	******
	********	************	*	***	*	****
	**********	****	*	*	*	*
	*****	*************	*	*	*	*
	******* ****	******* ****	*	*	*	*
	**********	********	*	*	*	*
	***** *****	*******	*	*	*	*
	*****	*****	*	*	*	*
	*******	*********	*	*	***	***
	*********	*********	*	*	***	***
	*********	*********	*	*	*	*
	****	******	*	*	***	***
	*******	****	*	*	*	*

공종	주요 변경내역						직접비 (단위:천원)
	품명	규격	단위	당초	변경	증·감
*** *** ****	********	***	*	*	*	*
	***** *****	*******	*	*	*	*
	*********	*******	*	*	***	***
	******	**********	*	*	**	**
	******	**	**	*	*	*
	******	***	**	*	*	*
******							*********

○ 건설사업관리단 검토의견

- 현장여건 및 유관기관(서부도로사업소) 협의사항을 반영하여 변경 시공함이 타당하다고 판단되며, 실정보고에 대한 검토결과 적정함.

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.