문서번호	설비부-26388
결재일자	2022. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김현기	07/20
		代장병선

『광역소공인특화지원센터 건립 전기, 통신공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2022. 7월

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『광역소공인특화지원센터 건립 전기, 통신공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

『광역소공인특화지원센터 건립 전기, 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재 납품기한 연장 요청건에 대하여 검토보고 드림

1
		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 전기, 통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

○ 규    모 : 지하 2층/지상 7층, 연면적 2,711,51㎡

○ 계약현황

(단위 : 원)

구 분	계약자	차 수	계약기간	계약금액
전기공사	*********	**	**********************	***********
		**	***********************	***********
통신공사	********	**	**********************	***********
		**	**********************	***********

○ 건설사업관리단 : ㈜포스코에이앤씨건축사사무소,  ㈜비전이엔지기술사사무소

2
		관 련 근 거

○ 전기공사 관급자재 납품기한 연장 검토보고 [광역CM-0359호(2022.7.19.)]

○ 통신공사 관급자재 납품기한 연장 검토보고

: [광역CM-360호, 361호, 362호(2022.7.20.)]

○ 물품구매(제조) 계약일반조건 제25조(계약기간의 연장)

○「물품 다수공급자계약 특수조건」제26조(납품기한의 변경) 제2항

: 수요기관의 불가피한 사정이 있는 경우에는 계약상대자의 요청 없이도   납품기한을 2회에 한하여 연기할 수 있다.

3
		검 토 내 용

○ 납품기한 연장내용

(단위 : 원)

계약번호 (납품요구번호)	품 명	계약자	계약금액	납품기한		비 고
				당초	변경(연장)
***********	********	******	**********	*********	********	**** ****
*************	*****	*********	**********	*********	********	**** ****
*************** ******************	*****	*****	*********	*********	********
*************** ******************	**********	*****	**********	*********	********
*************** ******************	**********	*****	*********	*********	********
*************** ******************	**********	*****	**********	*********	********

○ 납품기한 연장 사유

- 선행공정(건축) 준공기한 연장에 따른 후속공정 관급자재 납품시기 미도래

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정(건축) 준공기한 연장에 따른 전기,통신공사 공정에 맞춰  관급자재 납품기한을 연장함이 적정하다고 사료됨

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

4
		보고자 의견

○ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)에 통보하여 납품기한 연장 조치하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.