문서번호	행정지원과-28359
결재일자	2022. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이래운	강정환	박달경	07/21
			김정일
협 조
	주무관		구자람

「2023년도 투자사업」

청사 시설개선 계획

2022. 7.

서부수도사업소

(행정지원과)

「2023년도 투자사업」

청사 시설개선 계획

2023년도 투자사업 예산편성 관련 청사 시설개선 계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

□ 2023년도 수도사업특별회계 예산 편성계획(기획예산과-24063, '22. 7. 7.)

○ 세출예산 편성방향: 페이고(Pay-Go) 원칙 준수

'Pay as you go'(번만큼 쓴다)의 약자로 지출총량(한도액) 내에서 효과 낮은사업은 삭감하고 효과 높은 사업은 확대

Ⅱ		추진목적

□ 노후시설의 선제적 정비를 통한 안전사고 방지

□ 청사 시설개선을 통한 근무환경 및 복리후생 향상

Ⅲ		주요 추진실적

□ 2021년 시설개선

○ 2021. 3. : 청사(본관 및 별관) 옥상 안전난간 설치

○ 2021. 4. : 전부서 사무 OA(책상, 파티션 등) 교체

○ 2021. 5. : 시설노후에 따른 남자샤워실 환경개선

○ 2021. 7. : 유휴공간을 활용한 휴게공간 조성(고객쉼터외 2개소)

○ 2021. 9. : 여성숙직제에 따른 당직실 환경개선

○ 2021. 10.: 시설노후에 따른 구내식당 환경개선

○ 2021. 12.: 청사 급탕설비 개선

□ 2022년 시설개선

○ 2022. 6. : 청사 난방용 보일러 교체공사

○ 2022. 6. : 공무직(시설정비원) 휴게실 조성

○ 2022. 6. : 청사 진입로 미끄럼방지 포장(진행 중)

Ⅳ		개선계획

□ 투자사업: ********************                  (단위: 천원)

연번	사업명	개선사유	사업비	비고
1	******* *********	*****************************	******	****
2	***********	************************	******	****
3	***********	*************** ******************	******	****

□ 세부내역

○ 청사 난방용 팬코일유니트 교체

2) 냉·온수를 실내기 내 코일에 통과시켜 냉난방을 공급하는 장치

- 현황

품명	규격	구입년도	수량(대)	비고 (교체사유)
팬코일유니트 (Fan Coil Unit)	바닥상치노출형	2003	70	내용연수 초과 및 노후 (팬코일유니트 내용연수 10년)

※ 상세내역 붙임 참조

구내식당 팬코일유니트	행정지원과 팬코일유니트

- 개선방안: 팬코일유니트(70대) 구매 및 교체공사 1식

*********************

**************

******************************************

**********************************

- 추진일정: 2023년 3월~ 7월(공사 발주 및 준공)

○ 체력단련실 시설 개선

- 추진사유: 부본부장 현장방문(2022. 4. 19.) 시 체력단련실 시설개선 건의

- 현    황

·위    치: 팔각정 2층

·면    적: 157.3㎥(47.6평)

·샤 워 실: 없음(본관 샤워실 사용중)

·주요 운동기구: 런닝머신 4대, 실내 자전거 2대, 웨이트 머신 10대 등

- 문제점: 체력단련실 내 탈의실 및 샤워실이 없어 이용에 불편이  있으며 운동기구가 전반적으로 노후되어 교체 필요

체력단련실 전경	체력단련실 내 탈의실 (개인용 사물함 뒷공간 임시 사용중)

- 개선방안

·체련단련실 내 남녀 샤워실(탈의실 포함) 신설

·노후 운동기구 교체(런닝머신외 4종)

체력단련실 배치도	샤워실 상세도

*********************

**************

*******************************

****************************************

- 추진일정: 2023년 3월~ 7월(공사 발주 및 준공)

○ 직원건강 및 여가활동 지원을 위한 힐링라운지 조성

- 추진사유

·청사 종합서고 정리 후 유휴공간 발생

·직원 의견수렴 결과 직원 건강 증진 및 여가 친목 도모 등으로  활용할 수 있는 다목적실 조성 제안(노조지부)

- 힐링라운지 조성 개요

·위    치: 팔각정 1층 (舊)종합서고

·면    적: 157.3㎥(47.6평)

·조성내역: 바닥 플러어링 보드(181㎡) 및 남녀 탈의실(1.6m×5.5m) 설치 등

·사용용도: 요가, 필라테스, 동호회 모임 등 다목적실로 활용

- **************

- 추진일정: 2023년 2월~ 9월(공사 발주 및 준공)

- 힐링라운지 조성안

힐링라운지 조성공간(예정)	힐링라운지 배치도(안)

Ⅴ		소요예산

□ 추정 사업비: *********                              (단위: 천원)

연번	사업명	소요예산	비고
*	****************	******
*	***********	******
*	***********	******
*		*******

Ⅵ		행정사항

□ 2023년도 투자사업 예산 반영 및 제출(본부 기획예산과)

붙임  1. 팬코일유니트 설치현황 1부.

2. 운동기구 교체대상 1부.

3. 사업비 산출내역 1부.  끝.