문서번호	기전과-23959
결재일자	2022. 7. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
오태환		김형집	07/21
			김용제
협조

2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업

교통신호기 공사 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

강서도로사업소

[기  전  과]

2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업

교통신호기 공사 발주계획 보고

2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산이 보행정책과에서 재배정되어 사업추진을 위한 공사발주를 시행하고자 함.

□ 관련근거

○ 2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산 재배정(1차) 알림

(교통운영과-2314호, 2022. 2 .18.)

※ 실시설계도서 납품(2022. 7. 20.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 총공사비 : 226,400천원

- 도급비 179,784천원, 관급비 30,072천원, 이전비 16,544천원

○ 공사위치 및 내용

- 강서구 강서구청입구 : 신호기(차/보) 이설 3본

- 영등포구 영등포전화국 교차로 : 후방신호기(차) 추가 설치 4조

- 영등포구 양평동교차로 : 신호기(차/보) 신·이설 4본

- 구로구 신애전자 앞 : 신호기(보) 이설 2본

- 양천구 신월동교차로 : 신호등주 부착대 길이 연장

○ 공사기간 : 착공일로부터 2022년 12월 12일까지

□ 예산과목

○ 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비

□ 발주방법 : 제한경쟁(지역제한)

○ 관련근거 : 지방계약법시행령제20조제1항제6호 및 시행규칙제24조

제1항제나호(추정가격 10억원 미만 전기공사)

□ 추진일정

○ 2022년 7월 : 공사발주

○ 2022년 8월 ~ 2022년 12월 : 계약, 착공, 정산 및 준공

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 설계도면(5개소) 1부.  끝.