문서번호	도시철도계획부-23818
결재일자	2022. 7. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
이민호		강명석	07/22
			代김동철
협조

도시철도 9호선 4단계 연장사업 1, 3공구 건설공사 실시설계 적격심의 관련 설계도서 검토 보고

2022. 7.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

도시철도 9호선 4단계 연장사업 1, 3공구 건설공사

실시설계 적격심의 관련 설계도서 검토 보고

도시철도 9호선 4단계 연장사업 1, 3공구 건설공사에 대한 실시설계 적격심의와 관련하여 설계도서를 검토 보고 드림

1		사업개요

【도시철도 9호선 4단계 1공구 건설공사】

o 사업위치 : 강동구 중앙보훈병원 ~ 대명초교입구교차로 부근

o 사업규모 : 총 연장 1,348m, 정거장 1개소

o 사업기간 : 2021.12. ~ 2028. 7.

o 총공사비 : 148,749백만원

【도시철도 9호선 4단계 3공구 건설공사】

o 사업위치 : 강동구 고덕아이파크 아파트 부근 ~ 고덕강일1지구 부근

o 사업규모 : 총 연장 1,486m, 정거장 1개소

o 사업기간 : 2021.12. ~ 2028. 7.

o 총공사비 : 133,275백만원

2		추진경위

o ′20.12. : 입찰공고(조달청)

o ′21.11. : 1, 3공구 실시설계적격자 선정 및 실시설계 시행

o ′21.12. : 1, 3공구 우선시공분(1차) 공사 착수

o ′22.  7. : 실시설계 도서 제출

- 1공구  대우건설 컨소시엄 / 3공구  한신공영 컨소시엄

3		실시설계도서 검토 개요

o 검토기간 : ′22. 7. 5.(화) ~ 7. 20.(수)

o 검토사항

- 기본설계 설계적격심의 시 지적사항 조치결과 검토

- 각 분야별 실시설계도서 검토

- 본부 협의사항 및 서울교통공사 등 관계기관 요청사항 반영결과 검토

o 검토방법 : 분야별 담당부서 검토(감리단 협조)

- 도시철도계획부 : 총괄

- 도시철도토목부 : 철도, 토목구조, 토질 및 기초, 토목시공분야

- 도시철도건축부 : 건축분야

- 도시철도설비부 : 전기, 기계분야(소방기계 포함)

4		설계도서 검토 결과

************************************

*******	*	***	***	***
*	***	***	**
**	**	*	*
****	**	**	*
*****	**	**	**
****	**	**	*
**	**	**	**
**	**	**	*
**	**	**	**

5		향후계획

o ′22. 7. 22. : 실시설계도서 지적사항 제출(본부→기술심사담당관)

o ′22. 7. 29. : 지적사항 조치계획서 제출(실시설계적격자→본부)

o ′22. 8. 10. : 조치계획서 검토결과 제출(본부→기술심사담당관)

o ′22. 8. 17. : 실시설계 적격심의(기술심사담당관)

붙임  발주기관 실시설계도서 지적사항(총괄) 각 1부.  끝.