투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	에스플렉스센터 UPS 안정화공사(1차)에 따른 정전 안내

1. 서울산업진흥원(SBA) 인프라운영팀-1086호(2022.7.5.)와 관련입니다.

2. SBA에서 추진하고 있는 「에스플렉스센터 무정전 전원공급장치 안정화공사(1차)」로 인해 붙임과 같이 정전이 예정되어 있어 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며, 중단되는 대시민 서비스가 있을 경우 관련부서에서는 사전 안내하여 시민불편을 최소화하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 정전작업 완료 후 시스템 장애가 있을 경우 즉시 우리부서로 연락하여 주시기 바랍니다.

□ 정전개요

구 분	정 전 일	정 전 시 간	정 전 내 용	정 전 대 상	정전복구 확인연락 요청
1일차	'22.7.23.(토)	00:00 ~ 03:00 (3시간)	변압기(11번)와 배전반 연결작업	CU편의점, 아프리카tv 등	7.23.(토) 08:00
2일차	'22.7.25.(월)	00:00 ~ 03:00 (3시간)	변압기(12번)와 배전반 연결작업	온더피트니스, 덱스터스튜디오 등	7.25.(월) 08:00
3일차	'22.8.4.(목)	01:00 ~ 05:00 (4시간)	기존 UPS(1,4,5호기) 절체작업	사이버안전센터, CCTV안전망센터 등	8.4.(목) 08:00
4일차	'22.8.9.(화)	01:00 ~ 04:00 (3시간)	기존 UPS(3A, 3B, 3C) 절체작업	TBS 등	8.9.(화) 08:00

□ 정전범위 : 「붙임」정전일정 및 범위 참조

○ 정전 1일차 시너지움동 전체 승강기 운행 중단

○ *****************************************************

********************************************************************************************

□ 협조사항

○ 정전작업 전 해당시설물 전기차단기를 내리고, 작업완료 후 전원 투입하여 기기 오동작 및 소손방지

○ 정전작업으로 인한 대시민 서비스 중지 사전안내 철저

○ 정전 복구 후 시스템 이상유무 담당자별 확인연락 요청(문자) → **********************

붙임  1. 방침서 1부.

2. 정전일정 및 범위 1부. 끝.

	서울특별시데이터센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(뉴미디어담당관), 서 울 특 별 시 장(시민봉사담당관), 서 울 특 별 시 장(빅데이터담당관), 서 울 특 별 시 장(정보통신보안담당관), 서 울 특 별 시 장(교통정책과장), 서 울 특 별 시 장(버스정책과장), 서 울 특 별 시 장(택시정책과장), 서 울 특 별 시 장(주차계획과장), 서 울 특 별 시 장(교통정보과장), 서울특별시상수도사업본부장(요금제도과장), 서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장), 서울특별시상수도사업본부장(전산정보과장), 서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장), 서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장), 서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장), 서울물연구원장, 서울역사박물관장(총무과장), 서울역사박물관장(시설과장), 정보자원운영과장, 기획관리과장, 클라우드센터운영과장, 인터넷통신과장, 서울특별시한강사업본부장(공원시설과장), 서울산업진흥원대표이사, 서울특별시장(미디어콘텐츠산업과장), 서울특별시미디어재단티비에스 대표이사, 재단법인서울디지털재단이사장, 서 울 특 별 시 장(동물보호과장), 한국e스포츠협회, 온더피트니스, 아프리카tv, 디에스멘토링, 덱스터스튜디오, 옥성정보통신, CU 상암S플렉스점, 온더피트니스, 카페본주르
주무관	최경호		에스플렉스센터운영과장	07/22
代박용운
협조자
시행	에스플렉스센터운영과-23151	(	2022.07.22	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움관 2층	/	https://www.splexcenter.com/
전화	02-3470-1533	/전송	02-2124-2710	/	cynan77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)