문서번호	설비부-26473
결재일자	2022. 7. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비설계과장	설비부장
전덕재		장재순	07/22
			代장병선
협조

『동부간선도로확장 1·3 공구 전기공사』

준공기한 연장 검토보고

2022. 07.

도시기반시설본부

(설비부)

『동부간선도로확장  1·3 공구 전기공사』

준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는 『동부간선도로확장 1·3공구 전기공사』관련, 준공기한 연장에 대하여 검토하고 보고 드림.

▸준공기한연장: 2022.07.31.(당초). ⇒  2022.12.31.(변경): 증 153일

※ 계약금액 변경 없음.

□ 공사 개요 : 동부간선도로확장 1·3공구 전기공사(공정률:85%)

❍ 공사위치: 노원구 월계1교 ~ 의정부시계

－ 1공구: 초안산지하차도 인근 중랑천 산책로·스포츠시설 보안등

－ 3공구: 상계주공(1~3단지, 10·11단지) / 마들지하차도·수락고가차도

❍ 공사규모: 월계1교~녹천교 간(1.4km) 도로확장(4차로→6차로)

－ 1공구: 보안등 38본(LED 50W), 조명타워1EA(LED100W×3)

－ 3공구: 가로등기구 교체 144등, LED터널용등기구 229등 설치

❍ 공사기간: 2021.05.03. ~ 2022.07.31.

❍ 계약금액: 543,257,000원(도급비)

❍ 시 공 사: ㈜남경전설 (감리사: ㈜동부엔지니어링)

□ 관련근거

❍ (계약예규)공사계약일반조건 제26조(계약기간의 연장) 1항

❍ 계약기간 연장 요청 검토보고(동부간선도로 1·3공구 전기공사)

(동삼감 제2022-142, `2022.07.21.)

□ 검토내용

❍ 공사 변경내용(준공기한 연장)

계약자	계약건명	계약금액(원)	준공기한
			당초	변경(연장)
㈜남경전설	전기공사	543,257,000	2022.07.31	2022.12.31

❍ 변경사유

－ 선행공종인 토목공사에 따른 후속공정(전기공사) 기간 연장 필요

－ 상계주공 11단지 방음벽 설치가 `22.09월 완료 예정으로서 방음벽

설치 후 전기공사(터널 등기구 설치 등) 및 시설물 인수인계 등의 기간 소요

❍ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 계약금액 : 변동없음

□ 건설사업관리기술인 검토의견

❍ 선행 토목공정 지연으로 계약기간을 연장(약153일)하는 것이 타당함.

□ 보고자 검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리기술인의 준공기한 연장 검토보고 내용이 적정하다고 판단

되어 전기공사 준공기한 연장코자 하며,

❍ 계약부서(총무부)에 변경계약을 의뢰하고자 함

□ 향후 일정

❍  ‘22년 7월   : 계약변경 의뢰(준공기한 연장)

❍  ‘22년 12월 : 공사 준공.

□ 붙임: 건설사업관리단 공문(계약기간 연장 검토보고) 1부.  끝