문서번호	정수시설과-21475
결재일자	2022. 7. 25.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
남상욱		김수영	07/25
			윤창진
협 조

［2023년 단위사업］

관리본관 옥상방수공사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  7.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[2023년 단위사업]

관리본관 옥상방수공사 추진계획

관리본관 옥상 방수층 노후로 내부에 누수가 수시로 발생되고 있어

방수기능이 저하되어 보수하고자 함

Ⅰ		보수 실적 및 계획

□ 정수시설물(건축물) 옥상 방수공사 추진실적

○ 건축년도 : 1999년 12월

시 설 물	구 분	연면적 (㎡)	방수시공		최근 보수실적
			시공공법	시공연도
송수펌프동	-	3,926.6	스카이패널	2008년	2016년
약품투입동	1·2계열	420			2018년
	3·4계열	420			2018년
여과지동	3계열	3,863		2009년	2018년
	4계열	3,863			2019년

□ 년차별 보수계획

시설물	구분	연면적 (㎡)	방수시공		보수계획
			공법	시공연도
여과지동	1·2계열	7,726	스카이패널	2010년	2023년
활성탄투입동	-	186		2011년	2023년 이후
탈수기동	-	1,078
GIS동	-	500
관리본관	-	1141.9	시트방수	2008년	2023년

※ 옥상 방수층 노후상태에 따라 년차적 보수시행

Ⅱ		문제점 및 정비계획

□ 현황 및 문제점

◯ 현재 관리본관 옥상방수 공법은 시트방수 공법으로 시공되어 있으며,

◯ 2008년에 시공되어 14년이 경과하여 우천시 건물 내부로 누수가 수시로 발생되는 실정으로 방수기능이 저하되어 보수가 필요함

관리본관 옥상 사진(원경)	관리본관 옥상 사진(근경)

□ 정비계획

○ 현재 시트방수 공법으로 시공되어 있으나, 기타 방수공법(도막공법 등) 검토 필요

- 특정공법 선정 심사위원회 의결후 공법선정

- 시공 공법의 생애주기 등을 비교,검토하여 최적안 선택

Ⅲ		추 진 계 획

□ 2023년 예산반영

◯ 사 업 명 : 관리본관 옥상방수 보수공사

◯ 소요예산 : 220,000천원

◯ 사업내용 : 관리본관 옥상방수 보수 1,417㎡

◯ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비

◯ 추진일정

- 설   계  --------------------- 2023. 2.

- 계약심사 --------------------- 2023. 2.

- 공사발주 및 계약 ---------------- 2023. 3.

- 공사착공 및 사업시행 ----------- 2023. 4. ~ 9.

Ⅳ		사 업 효 과

□ 구조물의 내구력 및 효용 증진으로 구조물 최적 상태 유지

□ 옥상 방수층의 지속적인 방수력 유지로 시설물 안전 확보

끝.