문서번호	설비부-26698
결재일자	2022. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비총괄과장	설비부장
허진		장병선	07/26
			代장병선
협 조

『강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사』

실정보고 사항 검토 보고

2022. 7.

도시기반시설본부

( 설 비 부)

『강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사』

실정보고 사항 검토 보고

우리본부에서 시행중인『강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사』관련, 매헌지하차도 상부 교통처리계획 변경에 따른 2020년 하반기 공사중 신호등 공사 외 1건 실정보고 사항을 검토하고 보고드림

▸ 검토내용 : ① 교통처리계획 변경에 따른 공사중 교통신호설비 수량 변경

② 공사중 가로등 미이설분, 신호등 미설치분 설계 삭제

▸ 공사비 증감 :  ****************************************

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 중 신호등 이설공사

❍ 위    치 : 양재대로 매헌지하차도 상부

❍ 공사기간 : 2015 ~ 2020.12.

❍ 공 사 비 : ***********************

❍ 시 공 사 : 롯데건설㈜ / 신호등공사 실시설계·감리 : ㈜트래픽스

❍ 공 정 률 : 신호등 이설공사 100% / 전체 85%

< 위 치 도 >

Ⅱ		실정보고 내용

□ 실정보고 사항 요약

구분	제목	반영내용	증,감(천원)
교통처리계획 변경 반영	****************************************	******************* ********************* *************************	********
2. 미시공분 설계 삭제	************************	******************** ********************	*********
계(직접공사비)			********

□ 실정보고 세부내용

(1) 공사중 교통처리계획 변경사항에 따른 신호등 설비 수량 증가

❍ 관련근거

- 교통소통대첵(구룡, 매헌) 최종 자문회의 결과 통보[교통운영과-8548호, `20.05.25.]

❍ 변경개요

- 12단계 가교 설치로 인한 변경

▶ 매헌지하차도 공사중 선암교 접속부 가교설치로 양재대로/선암교 두 구간 신호 분리를 위한 신호등 설비 추가

매헌지하차도 선암교 가교 2개소 설치 차로분리를 위한 신호설비 추가
< 대상 현장 위치도 >	< 현장사진 : 민마루고개 부근 신호등 설치 >

- 13단계 구조물 시공 및 복공 해체로 인한 변경

▶ 차로별, 단계별 복공 해체로 인한 지주 이설 및 보행등 설치 등

복공 해체 구간
< 대상 현장 위치도 >	<매헌지하차도 상부 지주 이설 및 보행등 설치 >

- 13-1,2단계 구조물 시공 및 복공 해체로 인한 변경

▶ 차로별, 단계별 복공 해체로 인한 신호등 설비 이설, 재설치, 철거 등

복공 해체 구간
< 대상 현장 위치도 >	<매헌지하차도 상부 차량신호등, 부착대 설치>

❍ 공사비 증감 현황 ************

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
o 신호등 설비 (주요자재 변경현황)
*********	*****	*	*	*	*	*	*****	*****
********	**************	*	*	***	***	*	*****	*****
********	**********	*	*	*	*	*	*****	*****
********	**********	*	*	*	*	*	*****	*****
**		*	*	*	*	*	******	******
*******						*	******	******

(2) 가로등 미이설분, 신호등 미설치분 설계 삭제

❍ 변경개요

- 가로등 미이설분 8개소 설계 삭제

- 미군통신·과천ITS 구간 신호등 미설치분 설계 삭제

❍ 공사비 증감 현황 (**********)

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
o 신호등 설비 (주요자재 변경현황)
**********	*********	**	*	*	*	*****	*	********
**********	***********	**	*	*	*	***	*	******
*******	******	*	*	*	*	***	*	*****
*******	******	*	*	*	*	***	*	*****
**		*	*	*	*	******	*	********
*******						******	*	********

□ 공사비 변동내용

❍ 도급공사비 증감현황 : ************                   (단위: 천원)

구 분	내 용	당초	변경	증,감	비고
*****	********	*****	*	******
	********	******	*	*******
	*********	*	******	******
***********		*****	******	*****
*******		******	******	******

Ⅲ		검토의견 및 향후계획

□ 교통감리 검토의견

❍ 상기 내용을 토대로 서울시 교통운영과에서 승인된 교통처리계획도면 및 실제 현장 여건을 감안한 신호등 설계도서, 실작업 현황을 검토한 결과 설계반영이 타당한 것으로 사료되며, 공사중 가로등 및 미군통신·과천ITS 구간 신호등 공사 관련 미시공 설계수량 삭제 또한 타당한 것으로 사료됨

❍ 기존품목은 기존 계약단가 적용 / 신규품목, 신규 일위대가 없음

□ 보고자 의견

❍ 교통감리 기술검토의견서 내용대로 교통처리계획 변경 사항 및 당시 현장 여건을 반영한 실정보고 내용이 타당하다고 판단되며, 미시공 설계수량 삭제도 포함하여 향후 설계 변경 필요

□ 향후 계획

❍ `22.08. : 설계 변경(토목부)

❍ `22.12. : 매헌지하차도 상부 관련 공사 준공

붙 임 : 교통감리 실정보고 검토보고 1부.  끝.