문서번호	정수과-25124
결재일자	2022. 7. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
박인서		정충구	07/26
			권선조
협조	정수시설과장		김영준
	주무관		박소현

변경계약(유해화학물질 취급시설

설치․정기검사 및 화학사고예방관리계획서 용역)

2022. 7.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

변경계약(유해화학물질 취급시설

설치․정기검사 및 화학사고예방관리계획서 용역)

유해화학물질 취급시설의 법정 안전진단 및 화학사고예방관리계획서 작성·제출 수행을 위해 전문기관에 컨설팅 용역을 체결하였으나, 법적 검사기관의 안전진단 지연 등으로 설치·정기검사로 변경 추진하고자 함

Ⅰ. 추진근거

▢「화학물질관리법」제24조 및 환경부 유해화학물질 취급시설 안전진단   관련 질의 회신문(환경부 화학안전과-1138)

○ 연 1회 검사기관에서 정기검사(우리센터 대상일 2022.11.1. ), 설치검사는 용량     변경 시 가동개시 전, 용량이 변경 안될 경우 정기검사 시 검사를 받을 수 있으며,

○ 같은 법 제24조 제3항에 따라 안전진단 결과보고서를 제출한 경우, 1년 동안     정기검사를 면제 받을 수 있으나,

○ 환경부에서는 현재 검사 및 안전진단 개편 용역 추진 중으로, 화학사고 발생 이력이     없는 경우 2023년까지 안전진단 대상에서 제외될 것으로 예상함에 따라 안전     진단 용역을 설치·정기검사로 변경하여 추진

▢ 변경사항[용역업체 :**************]

구분	변경 전	변경 후	비고
용 역 명	안전진단 및 화학사고 예방 관리계획서 작성 용역	설치·정기검사 및 화학사고 예방 관리계획서 용역	-
과업지시서	안전진단 부분	설치·정기검사로 변경 “붙임2 참조”	막여과 장기휴지 제외
용역기간	계약일 ~ 2022.11.30.까지 (적합 통보 까지)	변경 없음	-
소요예산	******************** *************** *************************	*********************** *************** ****************************	부가세 포 함
	****************	**********************

Ⅱ. 추진계획

▢ 용 역 명 : 유해화학물질 취급시설 설치·정기검사 및 화학사고예방             관리계획서 용역

▢  용역기간 : 계약일 ~ 2022.11.30.(적합 통보시) 까지

▢ 용역대상

○ 설치검사****************************************

○ 정기검사********

*********************************

순번	시설명 (공정명)	설치장소 (실내/실외)	연간취급량 (톤/년) (허가증상)	설치일	최종 보수일	방제설비	비고
*	**** ******	**** ****	***	*****	*	** **	*************************
*	**** ******	**** ****	****	*****	*	** **	****** ************************
*	**** ******	**** ****	***	*****	*	** **	*************************
*	**** ******	**** ****	****	*****	*	** **	****** ************************
*	****	**** ****	*****	*****	*	** **	****** ************************
** *** ***	**** ***	**** *** ****	****	*****	*	** **	************************ ****** ***********************
** *** ***	**** ***	**** *** ****	****	*****	*	** **	************************ ****** ***********************

***************************

순번	시설명	설치장소 (실내/실외/지하)	시설용량 (m3)	설치일	최종보수일	방제설비	비고
*	***** *********	********	*	*****	*	***
*	***** *********	********	*	*****	*	***
*	*************	********	**	*****	*	***
*	*************	********	**	*****	*	***
*	***** *********	********	*	*****	*	***
*	***** *********	********	*	*****	*	***
** *** ***	******	***********	*	*****	*	***
** *** ***	******	***********	*	*****	*	***
** ******	********	***********	*	*****	*	***
** ******	********	***********	*	*****	*	***

*********************************

순번	물질명	CAS.no	함량 (%)	사용처	연간취급량 (톤/년) (허가증상)	과년도취급량 (톤/년) (실적보고서상)	저장성상 (액상/고상/기상)	저장방법
*	**	*********	***	** **	***	*	**	*** ****
*	******	*********	**	**	**	*	**	****

▢  용역내용(붙임1 : 과업지시서 참조)

******************************************

******************************************************************************

******************************************

****************************

***********

*******************************************

*******************************************

▢  정기검사 주요 절차

○ (검사기관) 한국가스안전공사에 신청 → 서류 및 현장진단 → 결과통보

○ (검사결과) 환경부(한강유역환경청)에 결과통보서 제출 후 확정

<유해화학물질 취급시설 정기검사 주요 절차>

정기검사 신 청	→	접 수	→	정기검사 실시 (서류+현장)	→	정기검사 결과서 통보	→→	제출/확정 (결과서)
영등포정수센터		가스안전공사		가스안전공사		가스안전공사		한강유역청

▢  추진일정

*********************

*********************************

************************************************

*************************************

Ⅲ. 협조사항

▢ 용역 계약 관련 업무(행정관리팀)

▢  과업에 필요한 취급시설의 설계 및 현황자료 등 기술진단의 서류검사 관련    하여 필요 자료의 협조 ․ 중요사항(정수시설과)

▢ 설치 ․ 정기검사 과정에서 발생한 보완․보수․보강 등 필요시 협조(정수시설과)

용역업체		정수과		정수시설과 등 관련부서
① 필요자료 목록 제시		② 필요자료 검토·파악		③ 필요자료 등 준비
⑥ 용역추진 자료 활용		⑤ 자료 수합 및 보완여부 검토		④ 필요자료 등 제출

붙임  1. 환경부 질의 회신문 1부.

2. 과업지시서(변경) 1부.

3. 합의각서 및 변경계약 내역서 각 1부.

4. 비교(타) 견적서 1부.  끝.