투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청 (여의샛강생태공원 목재시설물 긴급 정비사업_디자인형울타리)

「여의샛강생태공원 목재시설물 긴급 정비사업」에 소요되는 관급자재(디자인형울타리)에 대하여 다음과 같이 납품기한 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건 명 : 디자인형울타리(여의샛강생태공원 목재시설물 긴급 정비사업)

2. 관급자재 연기요청 내역

납품요구번호	품명	규격	수량	납품기한		비고
				당초	변경
12-22-1-58476-00	금속제울타리	W1500×H1230mm, 보행자방호/도심구간	436경간	2022. 8. 1.	2022. 10. 31.

3. 연기사유 : 여의샛강생태공원 창포원 정비공사 선행공정 추진 후 납품

붙임  분할납품요구서 1부.  끝.

	생 태 환 경 과 장
주무관	최현신		생태환경과장	전결 07/27
이성일
협조자
시행	생태환경과-21915	(	2022.07.27	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 공원부 생태환경과 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0839	/전송	02-3780-0745	/	hs2191@seoul.go.kr	/	부분공개(7)