문서번호	물재생계획과-26216
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	07/27
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (강남구)

2022. 07.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (강남구)

침수피해 예방 및 하수악취 해소를 위해 시행중인 「도곡로 언주초교 주변외 1개소 하수관로 개량공사」와 관련, 설계변경 및 시공물량 증가에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 사업규모 : 하수관로 개량 D700~1,000㎜, L=526m

○ 공사기간 : 2022. 4. 11. ~ 2022. 9. 7.

○ 예산현황                                                        (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	************ ***********	*******	*******	******	***************** ****************
*	**************** *************	*******	*******	*	*****

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 공사구간내 지장물(디자인휀스, 가로수) 복구 및 가시설 물량 증가

- 사업규모 : ① H=2.0m구간 가시설(간이흙막이) 추가 설치 L=139m

② 디자인휀스 철거 및 재설치 L=125경간

③ 지장수목 이식 및 사각맨홀 신규 설치 등

- 소요사업비 : **************************

- 위치도 및 현황사진

가. 가시설 추가 구간

나. 디자인휀스 철거 및 재설치 구간

다. 가로수 저촉 구간

Ⅳ		검토 의견

○ 사업 추진과정에서 하수관로 개량구간내 지장물(디자인휀스, 가로수) 저촉 및 가시설 추가 설치로 인해 공사비가 증가되어 예산이 부족한 실정으로, 본 사업의 낙찰차액을 활용하여 신속하게 공사를 추진함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정*********

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
*	************ ***********	*******	*******	******	***************** ****************
*	**************** *************	*******	*******	*	*****

붙임 : 관련공문 및 증빙자료 각 1부.  끝.