문서번호	물재생계획과-26213
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	07/27
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고(송파구)

2022. 07.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (송파구)

「가락시장주변 사각형거 보수공사」추진중 사업구간내 균열보수  물량 증가에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 사업규모 : 2열□2.5×1.5~2.5×2.0m, L=920m(단면보수 A=2,657㎡)

○ 공사기간 : 2022. 3. ~ 2022. 8. 19.

○ 예산현황                                                        (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	가락시장주변 사각형거 보수	1,150,000	1,000,437	149,563	*************** ****************

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 사업구간내 PC암거 시공이음부 균열보수 추가 시행

- 사업규모 : PC암거 시공이음부 균열보수(습식) 추가 A=394.2m

- 소요사업비 : ***************************

Ⅳ		검토 의견

○ 공사 구간내 PC암거 시공이음부에서 당초 정밀점검(진단)시에는 발견하지 못한 누수가 다수 확인함에 따라, 금회 공사시 낙찰차액을 활용하여 균열보수를 병행 시행함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정(시 → 송파구)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	****** *******	*********	*********	******	*************** ****************

- *********************************

붙임 : 관련공문 및 증빙자료 각 1부.  끝.