문서번호	물재생계획과-26214
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	07/27
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (송파구)

2022. 07.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (송파구)

「송파대로36길 주변 오수관로 개량공사(2차)」추진중 사업구간내 노후 하수관로 추가 정비, 폐기물 수량 증가, 사토장 변경 등 설계변경 사항 발생에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 공 사 명 : ******* 주변 오수관로 개량(2차)

○ 사업규모 : 오수관로 개량 D300~400㎜, L=1,198m

○ 공사기간 : 2022. 3. 22. ~ 11. 30.

○ 총사업비 : ***********

○ 발주현황                                                         (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	********** ***********	*********	*********	*******	*****	******
					****	*******

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 공사구간내 노후 하수관로 추가 정비 등 시공물량 증가

- 사업규모 : 노후 하수관로 추가 정비 D600㎜, L=196m

사토장 운반거리 및 건설폐기물 수량 증가 1식

- 소요사업비 : ****************************

- 위치도 및 현장사진

Ⅳ		검토 의견

○ 공사 추진과정에서 사업구간내 노후 하수관로 추가 정비, 사토장 운반거리 및 건설폐기물 증가 등 설계변경사항 발생으로 인해 낙찰차액 사용을 사용하여 신속하게 정비함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정*********

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
*	********** ***********	*********	*********	*******	*****	******
					****	*******

붙임 : 낙찰차액 사용 요청서 및 관련공문 각 1부.  끝.