“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2회 최종) 시행 (2021년 관악, 금천구 상수도(송배수관정비,포장복구)공사 건설폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인『2021년 관악,금천구 관내 상수도공사(송배수관정비,포장복구) 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회최종)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2021년 관악,금천구 관내 상수도공사(송배수관정비,포장복구) 건설폐기물

처리용역

나. 계 약 자 : ㈜진흥중공업 대표 박찬양

다. 계약기간 : 2021.08.13 ~ 2022. 7. 31

라. 설계변경 사유 : 공사현장 여건에 따른 공종별 폐기물량 변동

마. 설계변경 내역                                                 (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고 (계약기간)
********	***********	***********	*	2021.08.13 ~2021.12.31
********	***********	**********	***********	2022.01.01 ~2022.07.31
********	***********	***********	***********	2021.08.13 ~2022.07.31

바. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비.

- 상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(누수복구)

- 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 심의 의결서 1부.

3. 설계변경 내역서 및 물량산출서 각 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

주무관	이용호		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	조임남		남부수도사업소장	07/27
박병성
협조자	주무관	정선이
시행	급수운영과-27418	(	2022.07.27	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4556	/전송	02-3146-4589	/	l*********3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)