문서번호	도로보수과-24582
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
맹우재		윤옥광	07/28
			代박성주
협조
	주무관		김영민

『2022/2023년 제설대책』에 따른 자동염수살포장치 신설 계획 보고

2022. 7.

서부도로사업소

도 로 보 수 과

『2022/2023년 제설대책』에 따른

자동염수살포장치 신설 계획 보고

2022/2023년 겨울철 제설대책 추진과 관련하여 폭설시 교통사고 예방 및 시민불편 최소화를 위하여 상습결빙 등 제설 취약구간(양화대교 북단램프)에 자동염수살포장치를 설치하여 효율적인 제설작업을 하기 위한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 원격제설시설 설치계획에 따른 예산 배정(교부) 알림

○ 도로관리과-24953호('22.6.29.)

Ⅱ		설 치 현 황

□ 자동염수살포장치 설치 현황(8개소)

연번	위 치	용 량(톤)	설치년도	비 고
1	삼일대로 소파로	5	2019.12월
2	성산로(현저고가 하부)	10	2012.11월
3	성산로(금화터널~봉원고가)	10	2015.11월
4	성산로(금화터널~현저고가)	10	2016.08월
5	통일로(박석고개)	10	2017.12월
6	성산로(성산고가 하부)	5	2018.12월
7	통일로(산골고개)	10	2019.12월
8	남산3호터널 입구	10	2022.03월

Ⅲ		사 업 개 요

□ 재배정 예산 : 290백만원

□ 예산과목

○ 도로시설물 관리, 도로 및 도소부속물관리, 제설대책추진, 시설비

□ 양화대교 북단램프 2개소(신설)

○ 위    치

- 양화대교 ⇒ 강변북로 진출램프(L=200m)

- 강변북로 ⇒ 양화대교 진입램프(L=250m)

○ 규    모 : L=450m

○ 소요예산 : 251,400,750원

- 자동염수살포장치 : 221,143,750원(조달수수료 포함), 전기 : 30,257,000원

Ⅳ		추 진 계 획

□ 양화대교 → 강변북로 진출램프 자동염수살포장치 신설

○ 예 산 액 : 140백만원(재배정)

○ 소요예산 : 119백만원(자동염수살포장치 105백만원, 전기공사 14백만원)

○ 구매방법 : 조달구매(우수조달 물품)

품 명	규 격	가 격	업체명	인도조건	비고
눈및얼음 융해장치	저장탱크:10,000L PE배관 : 100m	85,753,000원	리텍(주)	현장설치도
살수기	PE배관 : 100m	19,380,000원			추가 구매
조달수수료		567,710원
계		105,700,710원

- 선정사유 : 조달청 우수제품으로 등록되어 있고, 현재 우리 사업소 관내에 다수 설치된 제품으로 향후 점검 및 A/S가 용이

○ 전기공사

- 계약방법 : 수의계약 (견적 최저가)

- 근   거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1하 제5호(추정가격 2,000만원 이하)

- 업 체 명 : 일우전력 대표 이상란

- 소요예산 : 14,990,000원

□ 강변북로 → 양화대교 진입램프 자동염수살포장치 신설

○ 예 산 액 : 150백만원(재배정)

○ 소요예산 : 130백만원(자동염수살포장치 115백만원, 전기공사 15백만원)

○ 구매방법 : 조달구매(우수조달 물품)

품 명	규 격	가 격	업체명	인도조건	비고
눈및얼음 융해장치	저장탱크:10,000L PE배관 : 100m	85,753,000원	리텍(주)	현장설치도
살수기	PE배관 : 150m	29,070,000원			추가 구매
조달수수료		620,040원
계		115,443,040원

- 선정사유 : 조달청 우수제품으로 등록되어 있고, 현재 우리 사업소 관내에 다수 설치된 제품으로 향후 점검 및 A/S가 용이

○ 전기공사

- 계약방법 : 수의계약 (견적 최저가)

- 근   거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1하 제5호(추정가격 2,000만원 이하)

- 업 체 명 : 스마트이엔씨 대표 이종환

- 소요예산 : 15,267,000원

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2022. 08. : 조달구매 및 수의계약 체결

□ 2022. 09. : 설치완료

첨부 : 1. 원격제설시설 설치계획에 따른 예산 배정(교부) 알림 공문 1부.

2. 산출기초조사(전기) 2부.

3. 위치도 및 현황사진 1부.

4. 견적서(전기공사 각2부) 4부.

5. 조달물품내역(자동염수살포장치) 1부.  끝.