문서번호	공원운영과-27079
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	녹지조경팀장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장		푸른도시국장
홍우진	김영미	代고소영	이용남		07/28
					유영봉
협 조
	자산관리과장			이은주
	시설과장			강병기

월드컵공원(난지천공원) 현장노동자 근무환경 개선계획

2022.  07. 27. (수)

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	√	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	√
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	√	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	√	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	√
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	√	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	√
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	√	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	√	□

월드컵공원(난지천공원) 노동자 근무환경 개선계획

월드컵공원(난지천공원) 내 산재되어 있는 노후 대기실을 정비하여 안전하고 쾌적한 공간으로 통합 신축하여 현장노동자의 복지증진 및 공원경관 회복에 기여코자 함

Ⅰ		근거 및 추진방향

□ 추진근거

ㅇ ｢도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제19조 및 같은법 시행규칙 제9조

ㅇ ｢산업안전보건법｣ 제128조의2

ㅇ ｢산업안전보건기준에 관한규칙｣ 제79조, 제79조의 2

ㅇ 서울특별시 청소근로환경시설 가이드라인(2014. 3.)

□ 추진방향

ㅇ 근로자 건강증진과 업무능률 제고를 위한 휴게공간 개선 및 편의시설 확보

ㅇ 산재되어 있는 대기실의 통합운영으로 공원관리 효율성 증대 및 경관개선

ㅇ 인근 체육시설 이용 시민과 함께 사용할 수 있는 편익시설 통합 설치

ㅇ 조성 예정인 난지체육공원(가칭) 관리인원 등을 포함하여 신축

	<월드컵공원 대기실 개선 현황>
□ 총 4개 공원 中 1개(하늘공원) 완료, 1개(평화의공원) 진행 중 □ ‘18. 2.~‘19. 11.: 하늘공원 대기실 신축 계획수립, 공사 착공 및 준공 □ ‘21. 4.~‘22. 10.: 평화의 공원 대기실 정비 계획수립 및 설계용역 추진 중

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 시설규모: 녹지관리 대기실 등 6개동

ㅇ 녹지관리 대기실 2동(창고 포함), 환경관리 대기실 1동, 샤워실 3동

□ 인력현황: 총 19명(공무직 6명, 기간제노동자 등 13명)

□ 시설세부현황

시 설 명	구 분	규모(㎡)	재 질	이용인원(명)	비 고
합 계		129		19
녹지관리 대기실	소 계	54	컨테이너, 목재	9
	대기실	18	컨테이너 (6m×3m)	6(남)
	창고	18	컨테이너, 목재 (6m×3m)	-
	대기실	18	컨테이너 (6m×3m)	3(여)
환경관리 대기실	대기실	18	컨테이너 (6m×3m)	10 (남 3, 여 7)
샤워실 (현장인력)	남·여	21	컨테이너 (7m×3m)	19
샤워실 (체육시설 부속)	남·여	36	가설건축물 (6m×3m×2동)	시민 이용

※ 현재 1인당 휴게시설 규모: 대기실 면적 54㎡/19명 = 2.84㎡

□ 문 제 점

ㅇ 이용인원에 비해 휴게공간 협소(2.84㎡/인- 사물함 등 보관공간 포함)

ㅇ 노동자 편익시설(샤워장, 세탁실 등) 공간부족으로 불편 야기

ㅇ 기존 시설물이 목재 가설물로 안전 및 공원미관 저해

ㅇ 공공안전관, 여가시설 근무자 등 휴게시설 부재로 민원발생

Ⅲ		개 선 계 획

□ 사 업 명: 월드컵공원(난지천공원) 현장노동자 대기실 신축사업

□ 사업기간: ‘23. 1. ~ ‘24. 12.

□ 위    치: ***********************

□ 규    모:***************************

□ 세부시설(안): 휴게시설, 샤워시설, 창고 등

ㅇ*************************************************

***********************************

**********************************

※「청소근로 환경시설 가이드라인」(2014. 3.) 권장규모 적용(1인당 5㎡ 이상)

□ 소요예산: *************************************

추진년도	구 분	산출근거	사업비(천원)	비 고
******			*********
****	****		*******
	**** *****	**********************	*****	******
	*****	*******************	******
****	****		*********
	*****	*********************************** ****************************** **********************************	*********	***************** ***** ************
	***	***************************** ********************************	*******
	감리용역비	감리용역비 1식 × 20,000천원	20,000

□ ***********************

******************

****************************************************

******************************************

□ 단계별 추진일정

사업계획수립		공유재산심의회		실시설계용역 발 주		공원조성계획 (변경)결정		공용건축물협의 계약심사
서부공원녹지사업소		자산관리과		서부공원녹지사업소		도시공원위원회		마포구 건축과 계약심사담당관
‘22. 7.		‘22. 9. 22.		‘23. 2.		‘23. 3.~6.		‘23. 8.

	실시설계용역 준공		신축공사비 예산편성		공사발주		공사준공		기존시설정비
	서부공원녹지사업소		서부공원녹지사업소		서부공원녹지사업소		서부공원녹지사업소		서부공원녹지사업소
	‘23. 9.		‘23. 9		‘24. 1.		‘24. 9.		‘24. 10.~12.

Ⅳ		행 정 사 항

□ 사업추진계획 수립 및 예산 확보: 공원운영과

□ 도시공원위원회 심의 및 사업(용역,공사) 추진: 시설과

□ 재산변동처리: 공원운영과

□ 기존대기실 정비 예산확보 및 추진: 공원운영과, 시설과

→ 신축공사 완료 후 기존시설물 철거 및 녹지 복구

붙임  1. 사용인원 및 대기실 신축 사업대상지 위치도 및 현황사진 1부.

2. 난지천 대기실 및 창고 현황 1부.

3. 대기실 신축 평면도 1부.  끝.