등록번호

어르신복지과-15137

주무관

어르신재가복지팀장

어르신복지과장

복지문화국장

등록일자

2022.7.28.

권병우

이미경

김상한

07/28

윤석환

결재일자

2022.7.28.

공개구분

부분공개(5,7)

협  조

아름다운 변화, 열린구정, 행복도시 서대문
「구립데이케어센터 확충 리모델링 공사」 준공기한 (2차) 연기 검토 보고

서 대 문 구

어르신복지과

아름다운 변화, 열린구정, 행복도시 서대문
「구립데이케어센터 확충 리모델링 공사」 준공기한 (2차) 연기 검토 보고

건축 시공사로부터 설계서와 공사현장 상태의 불일치 및 관급자재의 수급 지연 등으로 인해 공사기간 연장 요청이 있어 검토한 바,   연장함이 타당하여 준공 기한을 연기 하고자 함

Ⅰ	추진근거

□ ***************************************************

□ 건축과-18240(2022.07.27.)호 – 준공기한 연기 검토보고

Ⅱ	공사개요

□ 공 사 명 : 구립 데이케어센터 확충 리모델링 공사

□ 위    치 : 연희로29길 5(舊서대문구 보훈회관)

□ 규    모 : 지하0층/지상3층, 연면적 : 324.88㎡

□ 공사기간 : 2022. 1. 10. ~ 2022. 9. 28.(262일)

※ 최 초 : 2022. 01. 10. ~ 2022. 07. 08.(180일)

□ 계약금액 :*금1,778,437,700원(금일십칠억칠천팔백사십삼만칠천칠백원)

□ 계약현황

구 분	계약(납품)업체	계약(납품)기간	계약금액	비고
공사
건축기계	******* ***********	(총차)21.12.29. ~ 22.09.28. (1차)21.12.29. ~ 22.07.30. (2차)22.05.10. ~ 22.09.28.	(총차)1,181,298,170원 (1차)827,480,970원 (2차)353,817,200원	1회 연장
전기	*******	21.12.28.~22.09.28.	130,932,090원	1회 연장
통신	*********	21.12.28.~22.09.28.	112,307,550원	1회 연장
소방	********	21.12.28.~22.09.28.	72,594,000원	1회 연장
용역
폐기물	********* *********	22.01.10.~22.07.29.	18,130,000원	준공예정
건축감리	**********	21.12.28.~22.10.06.	9,972,000원	1회 연장
소방감리	*****	21.01.24.~22.10.06.	5,750,000원	1회 연장
관급자재
엘리베이터	********* ****	22.02.23.~22.09.28.	60,010,230원	계약 취소
냉난방기	********	22.02.17.~22.09.28.	38,252,210원	1회 연장
위생기기	********	22.02.17.~22.09.28.	3,111,040원	1회 연장
공기순환기	******	22.02.18.~22.09.28.	23,361,480원	1회 연장
방송설비	********* ****** ********	22.02.18.~22.09.28.	18,447,720원	1회 연장
분전반	******	22.02.17.~22.09.28.	19,611,850원	1회 연장
조명기구	*****	22.02.18.~22.09.28.	4,203,320원	1회 연장
레미콘	*******	22.02.28.~22.09.28.	19,549,950원	1회 연장
철근	********	22.03.04.~22.09.28.	38,281,390원	1회 연장
창호공사	**********	22.03.22.~22.09.28.	22,624,700원	1회 연장
총 계			1,778,437,700원

Ⅲ	검토내용

□ 근거조항

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제13장 제6절 제3항

· 현장상태에 따른 설계변경

□ 연장사유

*****************************************

******************

*********************************************

□ 검토내용

***********************************************

**************************************

*****************************************

***********************************************************************************************************************************************

***********************************************

***************************************************

*************************************************

Ⅳ	준공기한 연장 계획

□ 준공일 : (당초)2022. 9. 28.(수) → (변경) 2022. 12. 10.(토) (73일 연장)

구 분	계약(납품)업체	계약(납품)기간		계약금액	비고
		당초	변경
공 사
건축기계	******* ***********	(총차)21.12.29.~ 22.09.28. (1차)21.12.29.~ 22.07.30. (2차)22.07.31.~ 22.09.28.	(총차)21.12.29.~ 22.12.10. (1차)21.12.29.~ 22.10.11. (2차)2210.12.~ 22.12.10.	변경없음	73일 연장
전기	*******	21.12.28.~22.09.28.	21.12.28.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
통신	*********	21.12.28.~22.09.28.	21.12.28.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
소방	********	21.12.28.~22.09.28.	21.12.28.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
용 역
폐기물	********* *********	22.01.10.~22.07.29.	준공예정으로 연기안함	-	-
건축감리	**********	21.12.28.~22.10.06.	21.12.28.~22.12.15.	변경없음	70일 연장
소방감리	*****	21.12.28.~22.10.06.	21.12.28.~22.12.15.	변경없음	70일 연장
관급자재
엘리베이터	********* ****	22.02.23.~22.09.28.	업체 귀책으로 인한 계약취소	-	-
냉난방기	********	22.02.17.~22.09.28.	22.02.17.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
위생기기	********	22.02.17.~22.09.28.	22.02.17.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
공기순환기	******	22.02.18.~22.09.28.	22.02.18.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
방송설비	********* ****** ********	22.02.18.~22.09.28.	22.02.18.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
분전반	******	22.02.17.~22.09.28.	22.02.17.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
조명기구	*****	22.02.18.~22.09.28.	22.02.18.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
레미콘	*******	22.02.28.~22.09.28.	22.02.28.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
철근	********	22.03.04.~22.09.28.	22.03.04.~22.12.10.	변경없음	73일 연장
창호공사	**********	22.03.22.~22.09.28.	22.03.22.~22.12.10.	변경없음	73일 연장

Ⅴ	행정사항

□  준공기한 연기 시행 : 어르신복지과 → 재무과

붙임 1. 변경계약 의뢰 공문  1부.

2. 공기 연장 보고(시공사)  1부.

3. 감리자 기술검토 의견서 1부.

4. 감독부서 검토 보고서 1부.

5. 변경 공정표 1부.   끝.