문서번호	기후변화대응과-25932
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건물온실가스감축팀장	기후변화대응과장
신효섭		이경옥	07/28
			김정선
협 조
	고용훈련팀장			박지환

북부ㆍ중부기술교육원

ZEB 전환 리모델링 설계용역 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

기후환경본부

(기후변화대응과)

「북부·중부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역」과 관련하여 운영부서의 내진설계 협조요청에 따라 내진과업을 추가하여 용역변경 시행하고자 함

북부•중부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역 변경계획

Ⅰ		용역변경 배경

○ 추가과업 발생

- ********************************

- **************************************

※ ********************************************************

○ 용역변경 필요성

- ****************************************

· ****************************************

· *************************************

※ 용역별 개요

구분	설계용역명		비고
	북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링	중부기술교육원 ZEB 전환 리모델링
대상건물(규모)	본관(1,991㎡)	나눔관(1,468㎡)
위치	노원구 덕릉로70가길 81	용산구 한남대로 136
계약자	건축사사무소 알이도시건축	건축사사무소 알이도시건축
계약금액	52,127,900원	53,111,300원
계약기간	2022.4.28~10.24	2022.4.29~10.25

Ⅱ		추진경위

○ ‘21.10.28 : 「'22년 공공건물 ZEB 전환 사업계획」(기후변화대응과-14417호)

○ ‘22. 4.11  : 시 소유 건물 ZEB 전환 리모델링 설계용역 시행계획

○ ‘22. 4.27  : 설계용역 계약 및 착수

○ ‘22. 7. 1  : ******************************

Ⅲ		계약변경

○ 근거 : 지방자치단체 용역계약 일반조건 Ⅵ(과업내용의 변경 및 계약금액의 조정)

○ 변경내용(과업내용 추가)

- *************************************

○ 계약변경(용역비 및 용역기간)                                             (단위 : 원)

용역대상	구 분	당 초	변 경	증 감
북부기술교육원 (본관)	용역비	**********	**********	************
	용역기간	**************	**************	*****
중부기술교육원 (나눔관)	용역비	**********	**********	************
	용역기간	**************	**************	*****

※ **************************************

Ⅳ		행정사항

○ '22. 7월 : ZEB 전환 리모델링 설계용역 계약변경 의뢰

○ '22.11월 : ZEB 전환 리모델링 설계용역 준공

붙임  가. 변경 설계용역비 산출서 및 과업내용서 각 1부.

나. 용역사 합의각서 등 변경공문 각 1부(별첨).  끝.