코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	도시계획시설(하수도)사업 실시계획 (경미한 변경)인가 고시 알림

1. 방재시설부-25240호(2022.07.18)와 관련입니다.

2. 귀 부에서 시행 중인「반포천 유역 분리터널 건설공사」와 관련, 공사기간 연장에 따른 도시계획시설사업에 관한 실시계획 변경요청에 대하여 붙임과 같이 변경사항을 인가 고시(고시일:2022.7.28(목) 서울특별시고시 제2022-316호)하였음을 알려드리오니 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항(사업의 착수예정일 및 준공예정일)

1) 당 초 : 고시일로부터 ~ 2022년 7월 31일

2) 변 경 : 고시일로부터 ~ 2022년 9월 30일

붙임 : 고시문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	홍광호		하수설계정보팀장	홍현탁		물재생계획과장	07/28
박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-26287	(	2022.07.28	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3784	/전송	02-2133-1042	/	samsamc@seoul.go.kr	/	대시민공개