투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설폐기물처리용역(총차5회, 7차1회) 변경계약 의뢰

1. 도시철도토목부-25151(2022.7.28)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설폐기물처리용역(총차5회, 7차1회)

나. 계 약 자 : 대진환경산업(주) 대표이사 장인자

다. 계약금액 : [총차] 964,000천원  [7차] 142,295천원

라. 계약기간 : [총차] `15.08.24.~`22.07.31. [7차] `21.12.20.~`22.07.31.

마. 변경현황

[단위 : 원]

구 분		당 초	변 경	증 • 감
총차5회	계약금액	964,000,000	796,182,000	감)167,818,000
	계약기간	`15.08.24. ~ `22.07.31	변경없음	-
7차1회	계약금액	142,295,000	13,090,000	감)129,205,000
	계약기간	`21.12.20. ~ `22.07.31	변경없음	-

붙임  관련서류 1부. 끝.

	도시철도토목부장
주무관	한재호		토목1과장	허동		도시철도토목부장	07/28
최병훈
협조자	주무관	이형일
시행	도시철도토목부-25187	(	2022.07.28	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-772-7126	/전송	02-772-7306	/	jh1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)