문서번호	도시철도토목부-25151
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
한재호		허동	07/28
			최병훈
협조
	주무관		이형일

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

건설폐기물처리용역 설계변경(총차5회, 7차1회) 검토

2022. 7.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

건설폐기물처리용역 설계변경(총차5회, 7차1회) 검토

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설폐기물처리용역』관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경(총차5회, 7차1회)에 대한 검토임.

※ 계약금액 변경 : [총차] (당초)964,000천원 ⇒ (변경)796,182천원 (감167,818천원)

[7 차] (당초)142,295천원 ⇒ (변경)13,090천원 (감129,205천원)

1		용 역 개 요

■ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설폐기물처리용역

■ 규    모 : 총 36,959.54ton

■ 계약업체 : 대진환경산업(주) 대표 장인자

■ 계약현황

[단위 : 천원]

구 분		전 체	기준공(1~6차)	금 회(7차)	잔 여	비고
용역기간		`15.08.24 ~`22.07.31	`15.08.24 ~`21.12.19	`21.12.20 ~`22.07.30	-
계약금액		964,000	783,092	142,295	38,613
계약내역	폐아스콘	11,126	6,515.76	3,136.6	1473.64
	폐콘크리트	22,601.54	20,925.02	1,659.34	17.18
	건설폐자재	3,144	2,725.17	418.83	-
	혼합건설폐기물	88	22.37	65.63	-

2		보 고 내 용

■『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』준공에 따른 폐기물 운반·처리비

계약금액 조정(정산)

■ 현    황

[ 총차 5회]

- 용역기간 : 변경없음

- 계약금액 : [당초] 964,000천원 ⇒ [변경] 796,182천원 (감 167,818천원)

구 분		단위	단가 (원)	수 량			금 액(천원)
				당 초	변 경	증·감	당초	변경	증·감
운반비	폐아스콘	ton	8,422	11,126	6,578.76	감4,367.24	93,703	56,922	감36,781
	폐콘크리트	ton	8,605	22,601.54	21,189.02	감1,412.52	194,487	182,332	감12,155
	건설폐자재	ton	8,605	3,144	2,725.17	감418.83	27,054	23,450	감3,604
	건설폐기물 상차/운반비	ton	38,880	88	22.37	감65.63	3,421	870	감2,551
	스마트송장 이용료			-	1,453.37	증1,453.37	-	251	증251
처리비	폐아스콘	ton	15,138	11,126	6,578.76	감4,367.24	168,426	102,314	감66,112
	폐콘크리트	ton	13,840	22,601.54	21,189.02	감1,412.52	312,805	293,256	감19,549
	건설폐자재	ton	23,356	3,144	2,725.17	감418.83	73,431	63,649	감9,782
	혼합건설폐기물	ton	34,601	88	22.37	감65.63	3,045	774	감2,271
계				33,727.54	30,515.32	감6,264.22	876,372	723,818	감152,554
적용(단수조정)							-8	-16	-9
부가가치세							87,636	72,380	감15,255
합 계							964,000	796,182	감167,818

[ 7차 1회]

- 용역기간 : 변경없음

- 계약금액 : [당초] 142,295천원 ⇒ [변경] 13,090천원 (감 129,205천원)

구 분		단위	단가 (원)	수 량			금 액(천원)
				당 초	변 경	증·감	당초	변경	증·감
운반비	폐아스콘	ton	8,422	3,136	243	감2,893	26,416	2,047	감24,369
	폐콘크리트	ton	8,605	1,659.34	264	감1,359.34	14,279	2,272	감12,007
	건설폐자재	ton	8,605	418.83	-	감418.83	3,604	-	감3,604
	건설폐기물 상차/운반비	ton	38,880	65.63	-	감65.63	2,552	-	감2,552
	스마트 송장 이용료			-	1,453.37	증1,453.37	-	251	증251
처리비	폐아스콘	ton	15,138	3,136	243	감2,893	47,482	3,679	감43,803
	폐콘크리트	ton	13,840	1,659.34	264	감1,359.34	22,965	3,653	감19,312
	건설폐자재	ton	23,356	418.83	-	감418.83	9,782	-	감9,782
	혼합건설폐기물	ton	34,601	65.63	-	감65.63	2,271	-	감2,271
계							129,351	11,902	감117,449
적용(단수조정)							8	-2	-11
부가가치세							12,936	1,190	-11,745
합 계							142,295	13,090	감129,205

3		관리단 검토의견

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』준공에 따른 폐기물 실 반출 물량 정산을 시행하기 위한 총차5회 및 7차1회에 대한 변경계약은 타당한 것으로 판단됨.

4		조 치 의 견

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설폐기물처리용역』에 대하여 상기 검토의견과 같이 승인하고, 총차 및 7차에 대한 설계변경(계약금액 조정)을 시행 하고자 함.

붙임  관리단 공문 및 관련서류  1부. 끝.