문서번호	시설보수과-23874
결재일자	2022. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		시설보수과장		서부도로사업소장
김종성		안준수		07/29
				代박성주
협 조

2022년 하반기 도로시설물 안전점검 계획

2022. 07.

서부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2022년 하반기 시설물 정기안전점검 계획

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 시설물에 대하여『22년 하반기 정기안전점검 계획』을 수립 시행하여 시설물유지관리에 철저를 기하고자 함.

□ 추진근거

❍ 2022년 도로시설물 안전 및 유지관리계획[시설보수과-154호('22.1.6)]

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 정기점검 : 반기에 1회 이상

- 긴급점검 : 관리주체가 필요하다고 판단한 때

□ 추진개요

❍ 기   간 : 2022. 7 ~ 12월

❍ 대   상 : 총 74개소

계	일반교량	고가차도	입체교차	복개구조물	터 널	지하차도
74	30	14	2	12	5	11

▶ 1종: 9개,  2종: 24개,  3종 5개, 법정 외: 36개

▶ 등급현황 : A급 7, B급 61개, C급 5개, D급 1개

❍ 점검방법 : 정기점검, 특별점검, 순찰

❍ 점검조 및 시설물 현황

점검조	점검자 현황	시설물	1종	2종	법외	비 고
계	5명	74개	9	24	41	기술직5
1조	********	15개	2	6	7
2조	********	15개	1	4	10
3조	********	15개	2	4	9
4조	********	15개	2	5	8
5조	********	14개	2	5	7

□ 2022년 하반기 정기점검 계획

❍ 월별 점검계획

(단위:개)

구 분	점 검 기 간						계	점 검 시 설		비 고
	7월	8월	9월	10월	11월	12월		외부전문가 합동점검	자체점검
정기점검							74		74
추석 대비 안전점검							74		74
겨울철 대비 안전점검							74	74
순찰점검							74		74	도로소파, 고드름 제거, 배수구 점검 등

❍ 정기점검

▶ 반기 1회 이상 별첨 정기점검 일정표에 따라 담당 시설물 점검

▶ 정밀점검, 정밀안전진단 용역 중일 경우 용역사와 합동점검

▶“C”등급 “D”등급 시설물은 용역사 및 외부 전문가와 합동점검

❍ 특별점검 : 추석, 동절기 대비 점검 등

- 별도 계획수립 시행

❍ 순찰점검

▶ 전체 시설물에 대해 차량을 이용 반복적인 순찰을 통하여 안전위해

요인 조기발견 조치

순찰주기	점검시설물	점 검 일 정	점 검 방 법
시설물 별 월 1회 이상	74개	여건에 맞춰 탄력적 운영	점검노선(#별첨) 기준으로 순찰

□ 추진일정

❍ 2022. 7 ∼ 8월 : 혹서기 시설물 순찰 및 추석대비 점검

❍ 2022. 9 ∼ 12월 : 하반기 정기점검·동절기 안전점검 병행

붙임 : 1. 도로시설물 점검조별 담당자 현황 1부.

2. '22년 하반기 정기점검 일정표 1부.

3. 도로시설물 순찰 노선 1부.  끝.