문서번호	토목부-27873
결재일자	2022. 7. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	07/29
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교, 보차도교) 건설공사 -

설계변경(전체4회, 1차4회)검토 보고

2022. 07

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교, 보차도교) 건설공사 -

설계변경(전체4회, 1차4회)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량(보행교 및 보차도교) 건설공사 물가변동에 따른 설계변경(계약금액조정) 검토결과를 보고 드림

1		근 거

○ 공사 설계변경(전체4회, 1차4회)검토결과 보고(보행교) - 감리부-22-01082호('22.07.27.)

○ 공사 설계변경(전체4회, 1차4회)검토결과 보고(보차도교) - 감리부-22-01081호('22.05.27.)

2		공 사 개 요

□ 보 행 교

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.12.02.)

○ 도 급 비 :  *************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 보차도교

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.11.22.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

3		계약금액 조정 사유

□ 보 행 교

○ 제3회 물가변동에 따른 계약금액 조정(조정률 3.15%)

- '22.07.13. : 제3회 물가변동 계약금액 조정 요청(창동상계 제22-143호)

- '22.07.21. : 제3회 물가변동 계약금액 조정 승인(도기본-22-10418호)

□ 보차도교

○ 제3회 물가변동에 따른 계약금액 조정(조정률 4.24%)

- '22.07.13. : 제3회 물가변동 계약금액 조정 요청(창동상계 제22-143호)

- '22.07.21. : 제3회 물가변동 계약금액 조정 승인(도기본-22-10418호)

4		계약금액 조정 내역

□ 공사비 증·감 내역

○ 보 행 교 : 전체 ***************************

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감
총 차	총공사비	**************	**************	******************
	도 급 비	**************	**************	******************
	관급자재대	*************	*************	*
	이전비(폐기물처리비)	*************	*************	*
금차(1차)	총공사비	*************	*************	******************
	도 급 비	*************	*************	******************
	관급자재대	***********	***********	*
	이전비(폐기물처리비)	**********	**********	*

○ 보차도교 : 전체 ****************************

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감
총 차	총공사비	**************	**************	*	***********
	도 급 비	**************	**************	*	***********
	관급자재대	*************	*************	*	*
	이전비(폐기물처리비)	************	************	*	*
금차(1차)	총공사비	*************	*************	*	***********
	도 급 비	*************	*************	*	***********
	관급자재대	*************	*************	*	*
	이전비(폐기물처리비)	************	************	*	*

□ 물가변동 계약금액 조정 현황

○ 보 행 교

(단위 : 백만원)

구 분		물가상승비(k)	조정금액	증.감	비 고
총 차	합 계		***	******
	1 차	*****	***	******
	2 차	*****	***	******
	3차(금회)	*****	***	******
금 차 (1 차)	합 계		***	******
	1 차	*****	***	******
	2 차	*****	**	******
	3차(금회)	*****	**	******

○ 보차도교

(단위 : 백만원)

구 분		물가상승비(k)	조정금액	증.감	비 고
총 차	합 계		*****	********
	1 차	*****	***	*******
	2 차	*****	***	*******
	3차(금회)	*****	***	*******
금 차 (1 차)	합 계		***	*******
	1 차	*****	***	*******
	2 차	*****	***	*******
	3차(금회)	*****	***	*******

5		조 치 계 획

○ 물가변동 계약금액조정에 따른 설계변경사항으로 건설사업관리단 설계

변경 보고 내용은 적정한 것으로 판단되며 상기 검토결과와 같이 설계변경

(전체 4회, 1차4회) 및 변경계약을 시행 하고자함

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 각 1부. 끝.