문서번호	물재생계획과-26352
결재일자	2022. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	07/29
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (서초구)

2022. 07.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (서초구)

「*********** 오수관로 개량공사」추진중 사업 추진방식 변경(주간→야간), 시공물량 및 폐기물 증가 등 설계변경사항 발생에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 공 사 명 : 논현로27길 97 주변 오수관로 개량

○ 사업규모 : 오수관로 개량 D300~400㎜, L=1,023m

○ 공사기간 : 2022. 4. 21. ~ 12. 31.

○ 총사업비 : ***********

○ 발주현황                                                         (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	************ *******	*********	*********	*******	*****	******
					****	*******

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 사업 추진방식 변경(주간→야간), 시공 물량 및 폐기물 증가

- 사업규모 : ***********************************

***********************

*************************************

- 소요사업비 : ****************************

- 위치도 및 현장사진

가. 사업 추진방식 변경(주간 → 야간)

나. 폐기물 물량 증가

다. 노후 하수관로 추가 정비

Ⅳ		검토 의견

○ 공사 추진과정에서 상가 밀집지역 주민민원에 의한 야간공사 시행,  하수관로 추가 정비 및 건설폐기물 증가 등의 설계변경사항이 발생함에 따라, 동 사업의 낙찰차액 사용을 신속하게 추진함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정 *********

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
*	************ *******	*********	*********	*******	*****	******
					****	*******

붙임 : 낙찰차액 사용 요청서 및 관련공문 각 1부.  끝.