문서번호	기획예산과-9268
결재일자	2022.7.29.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		예산팀장		기획예산과장		기획재정국장
김혜린		代장은경		이정희		07/29 이현식
협조

★ ◉

- 2022년도 주민참여예산사업 -

상반기 모니터링 실시 결과보고

2022. 7.

(기획예산과)

- 2022년도 주민참여예산사업 -

상반기 모니터링 실시 결과보고

주민참여예산제의 실효성 확보를 위하여 2022년도 주민참여예산사업의 집행과정 및 추진결과에 대하여 모니터링을 실시하고 그 내용을 보고함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진근거

○ 2022년 주민참여예산 종합계획[구청장 방침 제73호(2022. 1. 28.)]

○ 2022년도 주민참여예산사업 모니터링 계획(기획예산과-7063호, 2022. 6. 10.)

□ 추진개요

○ 추진시기: 2022. 6. ~ 7.(2차 12월 예정)

○ 대상사업: 2022년도 주민참여예산 사업 58건, 사업비 1,503백만 원

○ 점검내용: 주민 제안사업과 일치여부, 사업 진행률 및 예산 집행률 등

○ 점검방법: 사업추진 현황 서면 검토 및 현장 점검

Ⅱ		집행 현황

□ 부서별 집행 현황

(단위: 개, 백만 원)

사업부서	사업 수	추진완료	추진중	부진	예산액	집행액	집행률
합 계	58	29	12	17	1,503	978.1	65.1%
자치행정과	9	3	3	3	162	103.1	63.6%
문화체육과	2	1	-	1	20	10	50.0%
지역경제과	1	-	-	1	5	0	0.0%
복지정책과	1	1	-	-	8	8	99.4%
어르신장애인복지과	1	-	-	1	50	0	0.0%
청소행정과	3	-	3	-	65	65	100.0%
도시계획과	6	-	5	1	136	113.5	83.5%
공원녹지과	25	20	1	4	784	589.1	75.1%
토목과	4	2	-	2	143	50.2	35.1%
치수과	4	1	-	3	90	10	11.1%
맑은환경과	1	-	-	1	10	0	0.0%
질병예방과	1	1	-	-	30	29.2	97.4%

□ 사업별 집행 현황(2022. 6. 27. 기준)

○ 총 58개 사업 {완료 29건, 정상추진 12건, 부진 17건}

- 평균 집행률 65.1%, 완료 사업 비율 50%

연번	동명	제안사업명	예산액	지출액 (집행률)	집행현황	부서명
1	왕십리도선동	은하수 가로공원을 쾌적하게	45	43.5 (96.6%)	완료	공원녹지과
2	왕십리도선동	꽃길을 만들어요	15	7.7 (51.4%)	정상추진	공원녹지과
3	왕십리도선동	마을활력소 공간 조성	40	24.9 (62.3%)	정상추진	자치행정과
4	왕십리제2동	무학봉 공원을 환하게! 안전하게!	35	34 (99.8%)	완료	공원녹지과
5	왕십리제2동	무학봉 어울림축제	10	0 (0.0%)	부진	문화체육과
6	왕십리제2동	가로등의 재탄생(광고물부착방지판 설치)	10	10 (100%)	정상추진	도시계획과
7	왕십리제2동	주민쉼터 조성	20	0 (0.0%)	부진	공원녹지과
8	왕십리제2동	왕십리제2동 교통섬 화단조성 및 의자설치	15	15 (100%)	완료	공원녹지과
9	마장동	마장 어린이공원 정비	40	34.9 (99.6%)	완료	공원녹지과
10	마장동	청계천 마장동 어린이 놀이터 확대 조성	30	0 (0.0%)	부진	치수과
11	마장동	자투리 녹지 수목 및 휴게 시설 정비	30	28.9 (96.3%)	완료	공원녹지과
12	사근동	주민쉼터 주변(경로당 주변 쉼터) 환경 정비	50	0 (0.0%)	부진	어르신장애인복지과
13	사근동	쌈지공원 등 유휴공간 내 화단 조성	30	29.8 (99.5%)	완료	공원녹지과
14	행당제1동	우리동네 자투리 화단 조성 및 유지관리	13	12.6 (97.1%)	완료	공원녹지과
15	행당제1동	광고물 NO! 우리동네 전신주를 지켜주세요!	12	12 (100%)	정상추진	도시계획과
16	행당제1동	왕십리역 10번 출구 주민휴게공간 조성	50	0 (0.0%)	부진	공원녹지과
17	행당제1동	전입주택과 아파트에 태극기 달기	5	1.7 (34.0%)	정상추진	자치행정과
18	행당제2동	쾌적하고 안전한 골목길 조성	50	0 (0.0%)	부진	토목과
19	행당제2동	우리동네 어린이공원들을 안전하게 만들어주세요!	25	21.5 (86.0%)	완료	공원녹지과
20	행당제2동	골목길 전신주를 지켜라!	20	19.5 (97.5%)	정상추진	도시계획과
21	행당 제2동	마을화단에 펫티켓 푯말 설치	5	0 (0.0%)	부진	지역경제과
22	응봉동	무단투기 예방 CCTV 설치	30	30 (100%)	정상추진	청소행정과
23	응봉동	응봉동 264-5 정비사업	50	0 (0.0%)	부진	공원녹지과
24	응봉동	미세먼지 신호등 설치	10	0 (0.0%)	부진	맑은환경과
25	금호1가동	방치된 자투리 공간 환경 개선	15	10.8 (71.8%)	완료	토목과
26	금호1가동	대현산 장미축제	10	10 (100%)	완료	문화체육과
27	금호1가동	동 주민센터 주차장 화단 정비	15	15 (100%)	완료	공원녹지과
28	금호1가동	전신주 불법광고물 정비	24	24 (100%)	정상추진	도시계획과
29	금호1가동	대현산 유아동네숲터에 나무를 심어주세요	16	16 (100%)	완료	공원녹지과
30	금호2-3가동	금호역 1번출구 앞 화단설치	20	19.4 (96.8%)	완료	공원녹지과
31	금호2-3가동	금호동3가 1259-1 일대 녹지대 정비	50	50 (100%)	완료	공원녹지과
32	금호2-3가동	금호산 유아숲 체험장 놀이시설을 재정비	30	28.2 (94.0%)	완료	공원녹지과
33	금호4가동	취약지역 거리를 걷고 싶은 돌화분길로 조성	50	50 (100%)	완료	공원녹지과
34	금호 4가동	금호4가동 방역차량 및 물품구매	30	27 (90.0%)	정상추진	자치행정과
35	옥수동	쓰레기여 안녕~ 옥수동 마을환경 정비	8	8 (99.4%)	완료	복지정책과
36	옥수동	안전하고 즐거운 통학로	30	0 (0.0%)	부진	토목과
37	옥수동	옥수역 주변을 깨끗하게	10	10 (100%)	완료	치수과
38	옥수동	주민센터 내 공유부엌 환풍기 설치	10	0 (0.0%)	부진	자치행정과
39	옥수동	자치회관 내 주민소통공간 조성	20	0 (0.0%)	부진	자치행정과
40	옥수동	그림이 있는 산책로	22	0 (0.0%)	부진	도시계획과
41	성수1가제1동	무단투기 근절을 위한 CCTV 설치	5	5 (100%)	정상추진	청소행정과
42	성수1가제1동	스마트 WE!! 키친	15	15 (100%)	완료	자치행정과
43	성수1가제1동	전신주에 우리 마을 심벌 입혀주기	48	48 (100%)	정상추진	도시계획과
44	성수1가제1동	채널 성수 일	22	19.9 (90.5%)	완료	자치행정과
45	성수1가제2동	해충 없는 우리 동네 만들기(위생해충살충기 설치)	30	29.2 (97.4%)	완료	질병예방과
46	성수1가제2동	뚝섬역 사거리 교통섬을 만남의 광장으로!	50	0 (0.0%)	부진	공원녹지과
47	성수2가제1동	주민센터 내 안내 키오스크 설치	5	0 (0.0%)	부진	자치행정과
48	성수2가제1동	둘레길 가로수림 정비	20	18.6 (92.8%)	완료	공원녹지과
49	성수2가제1동	성수이로 깨끗하고 쾌적한 화단 만들기	30	30 (100%)	완료	공원녹지과
50	성수2가제1동	둘레길 가로 수림대를 정비해주세요	30	30 (100%)	완료	공원녹지과
51	성수2가제3동	울퉁불퉁한 통학로 정비	48	39.4 (82.2%)	완료	토목과
52	성수2가제3동	아남어린이공원 시설 보수	40	40 (100%)	완료	공원녹지과
53	송정동	무단투기 방지 CCTV 설치	30	30 (100%)	정상추진	청소행정과
54	송정동	누구나 오고 싶은 송정 제방길	35	0 (0.0%)	부진	치수과
55	송정동	송정 제방길 안전 펜스 만들기	15	0 (0.0%)	부진	치수과
56	용답동	용답동 전농천 연계 꽃길 조성	50	49 (98.0%)	완료	공원녹지과
57	용답동	동 주민센터 주민 개방공간 개선	15	14.6 (97.1%)	완료	자치행정과
58	용답동	용답동 도로 옆 사면 정비	15	15 (100%)	완료	공원녹지과

(단위: 백만 원, % )

□ 사업별 집행률 부진 사유 및 향후 계획(예산 집행률 50% 이하)

○ 예산 집행률 부진 사업 총 17건

연번	부서명	제안사업명	(예산 집행)부진 사유 및 향후 계획
1	자치행정과	주민센터 내 공유부엌 환풍기 설치	대상지가 주민자치회 사무실, 다목적실로 선거로 인해 추진이 어려웠음. 7월 내 설치 완료 예정
2	자치행정과	자치회관 내 주민소통공간 조성	동 청사 내 카페 조성으로 인한 영리행위 관련 절차 확인, 주민의견 수렴으로 인해 사업 지연. 하반기 추진 완료
3	자치행정과	주민센터 내 안내 키오스크 설치	상반기 동 주민센터의 선거, 코로나 업무 지원으로 사업 지연. 8월 내 설치 예정
4	문화체육과	무학봉 어울림 축제	10월 중 개최 예정
5	지역경제과	마을화단에 펫티켓 푯말 설치	상반기 동 주민센터의 선거, 코로나 업무 지원으로 사업 지연. 하반기 추진 예정
6	어르신장애인복지과	주민쉼터 주변(경로당 주변 쉼터) 환경 정비	현재 공사진행중으로 7월 내 사업 완료
7	도시계획과	그림이 있는 산책로	하반기 추진 예정
8	공원녹지과	주민쉼터 조성	인근 주민들의 민원 발생 및 주민 의견 추가 수렴 등으로 7월 내 준공 예정
9	공원녹지과	왕십리역 10번 출구 주민휴게공간 조성	민원사항 발생, 주민의견 추가 수렴 등 7월 내 준공 예정
10	공원녹지과	응봉동 294-5 정비 사업	당초 사업이 서울시 추진사업과 중복되어 사업을 변경 및 협의로 사업 착수 지연. 7월 내 준공 예정
11	공원녹지과	뚝섬역 사거리 교통섬을 만남의 광장으로!	민원사항 발생, 주민의견 추가 수렴 등 9월 내 준공 예정
12	토목과	쾌적하고 안전한 골목길 조성	골목길 내 사유지 소유자 공사 동의서 수령 지연으로 7월 내 설치 완료 예정
13	토목과	안전하고 즐거운 통학로	어린이집 요청으로 방학기간(7월 말 ~ 8월 초)을 이용하여 시행 예정
14	치수과	청계천 마장동 어린이 놀이터 확대 조성	주민의견 수렴하여 하반기 공사 시행 예정
15	치수과	누구나 오고 싶은 송정 제방길	주민의견 수렴중으로 8월 내 설치 예정
16	치수과	송정 제방길 안전 펜스 만들기	주민의견 수렴중으로 7월 내 설치 예정
17	맑은환경과	미세먼지 신호등 설치	도로점용 허가 문제로 지연. 7월 내 설치 예정

Ⅲ		현장점검 결과

□ 현장점검 일정

○ 기    간: 2022. 6. 28.(화) ~ 7. 15.(금)

○ 대    상: 추진완료 사업 29건

○ 점 검 자: 성동구 주민참여예산위원회 및 지역주민(동별 시행)

연번	동명	사업명	현장점검 의견
1	왕십리 도선동	은하수 가로공원을 쾌적하게	- 유동인구 많은 주민센터 앞 노후시설물 보수 및 훼손된 녹지대 보식으로 주민 편의성 개진 - 데크 계단에 금속 미끄럼 방지 장비 설치하여 미끄럼 방지 및 파손 예방 요청
2	마장동	자투리 녹지 수목 및 휴게 시설 정비	자투리 공간을 활용하여 어르신 쉼터가 조성되어 쓰레기 무단투기 방지 등 주변 경관 개선에 효과적 주변 청결을 위해 청소 등 지속적인 관리 필요
3		마장 어린이공원 정비	화단이 잘 정비되어 우기에 흙이 무너져 내리지 않아 어린이들이 안전하게 이용 가능함 협소한 공간에 놀이기구가 적절하게 배치되어 있지만 추후 다른 놀이시설 추가 설치 요망
4	사근동	쌈지공원 등 유휴공간 내 화단 조성	당초 제안했던 대로 화단이 잘 조성되어 쾌적한 보행환경과 아름다운 볼거리 제공 오히려 화단에 무단투기가 성행할 수 있으므로 지속적인 유지관리 필요
5	행당 제1동	우리동네 자투리 화단 조성 및 유지 관리	관내 자투리 화단에 화단을 조성하고 기존 게시판을 리뉴얼하여 비용 절감 동네의 미관을 살리고 주민들에게 쾌적한 환경을 제공하도록 탈바꿈
6	금호 2-3가동	금호역 1번출구 앞 화단 설치	금호역 보도 앞에 화분을 설치를 통해 주변 환경 미관 형성 및 불법주정차 방지로 안전한 보행환경 조성
7	금호 4가동	취약지역 거리를 걷고 싶은 돌화분길로 조성	벽면녹화 및 화단조성은 잘 되었으나, 벽면 안쪽의 크랙 발생 여부가 확인되지 않으니 순찰을 강화하여 발생 시 신속한 조치 필요
8	옥수동	쓰레기야 안녕~ 옥수동 마을환경 정비	당초 무단투기가 빈번한 곳으로 화단조성을 통해 야외쉼터의 환경이 개선되어 보임 주기적인 관리를 통해 지속적 모니터링 필요
8	성수1가제1동	스마트 WE!! 키친	주방설비 및 구조 개선 등을 통해 주민들이 함께 공동체 활동할 수 있는 공간 조성 주민 화합의 공간이 될 것으로 기대
9	성수1가제2동	해충없는 우리동네 만들기	전기설비 배선공사 시 지중공사를 실시하여 주변 미관 유지 일부 해충살충기 주변의 큰 나무들로 기능이 저하되지 않도록 전기연결 상태 점검, 주변 녹지 가지 치기 등 환경 정비 요망
6	성수2가 제1동	성수이로 깨끗하고 쾌적한 화단 만들기	쓰레기 무단투기가 빈번히 발생하던 화단과 생육 불량인 수목이 정비되어 지나가는 주변 주민뿐만 아니라 지나가는 주민들에게도 깨끗하고 정비된 가로환경을 보여줄 수 있어 만족스러움
7	성수2가 제1동	둘레길 가로 수림대를 정비해주세요	수림대가 정비되어 깨끗한 환경이 조성되었으나 시간이 지나면 풀, 잡초 등이 다시 자라 지속적인 유지 및 관리가 필요함
8	성수2가 제3동	울퉁불퉁한 통학로 정비	깔끔하게 정리되어 쾌적한 거리 조성 및 안전성 확보로 보행안전사고 예방에 도움 주기적으로 주변 보행로의 잡초 청소를 병행하면 더욱 깔끔한 통학로가 조성될 것으로 보임
9	용답동	전농천 연계 꽃길 조성	봄에는 꽃길이 조성되었으나 현재는 잡초가 있음. 사계절 볼 수 있는 다양한 초화 식재 요망 예산액에 비해 변화가 미비함 무단투기를 원인으로 식물이 고사되는 것을 방지 하고자 자연친화적인 나무로 벽을 조성하면 좋겠음 잡초 제거 및 물주기 등 사후 관리 철저

□ 현장점검 주요 의견

□ 모니터링 사진

Ⅳ		우수 사례

□【용답동】동 주민센터 주민개방공간 개선

○ 위    치: 용답동 주민센터 2층 주민사랑방 및 4층 테라스

○ 기    간: 2022. 1. ~ 5.

○ 내    용

- 주민사랑방 리모델링 및 전자칠판 등 주민 스마트교육실 조성

- 인조잔디 및 테이블, 의자 배치로 주민쉼터 공간 마련

○ 우수한 점

- 2층 주민사랑방은 리모델링을 통해 공간환경을 개선하고 전자 칠판, 책상 등을 비치하여 주민회의 및 교육 공간으로 이용 가능하도록 함

- 4층 테라스는 인조잔디 및 캐노피 설치 등을 통해 주민들이 휴식할 수 있는 야외공간으로 조성하여 주민 활용도를 높임

- 향후 주민자치 프로그램 등 다양한 용도로 사용가능하여 투입예산 대비 사업효과와 주민만족도가 높음

Ⅴ		행정 사항

□ 하반기 재정집행 정책에 따라 11월 내 사업 종료 독려……기획예산과

□ 평가 및 보완사항에 대한 조치결과 제출	사업부서

붙임  2022년도 상반기 모니터링 관리카드 및 평가보고서(참고용) 각 1부.  끝.