문서번호	물재생시설과-10217
결재일자	2019.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		물재생시설팀장	물재생시설과장
양해선		오승민	07/24 임춘근
협조

용역 설계변경(정산) 보고

- 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립(2차) -

2019. 7.

용역 설계변경(정산) 보고

- 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립(2차) -

‘중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립’ 용역의 기술자문비등에 대해 설계변경(정산) 시행코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립(장기-2차)

○ 용역기간 : ’17.8.25 ~ ’19.7.31(2차 ’18.1.15 ~ ’19.7.31)

○ *******************************

***********************************************

○ 주요 과업내용

- 중랑물재생센터 시설현대화 기본계획 수립

․ 기존 시설 운영현황 분석 및 시설 계획의 기본방향

․ 추정공사비 산정 및 재정계획 수립

․ 운영 관리 계획 및 통합 관리 시스템 구축

- 서남물재생센터 계획기준 및 시설계획 수립

․ 기존 시설 운영현황 분석 및 시설 계획의 기본방향

․ 추정공사비 산정 및 재정계획 수립

□ 추진경위

○ ’17. 4.25 : 물재생센터 도시복합재생거점 구축 추진계획 수립

○ ’17. 7.12 : 발주방침 수립

○ ’17. 7.19 : 용역 입찰공고

○ ’17. 8.25~12.21 : 1차 용역 시행

○ ’18. 1.15 : 2차 용역 계약․착수

○ ’18. 2.13/ 4.17/ 12.10/ ’19. 5.23 : 1차~4차 자문회의

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 내역

(단위 : 천원)

*****	******			**********
	****	****	****	****	****	****
******	*******	*******	*	*******	*******	*
******	*******	*******	*	*	*	*
*****	*****	*****	******	*****	*****	****
******	******	******	*	******	******	*
**********	******	******	*	******	******	*
*****	*******	*******	******	*******	*******	****
*****	******	******	****	******	******	***
*	*******	*******	******	*******	*******	****

**********************************************

□ 조치계획

○ 용역 계약변경(2차분)

*********************************

○ 용역 계약변경 의뢰(→ 재무과)

붙임 : 설계변경 요청서 1부. 끝.