문서번호	동물보호과-3077
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	동물복지시설관리팀장	동물보호과장		시민건강국장
이종명	강경숙	이미경		02/11 박유미
협 조
	동부공원녹지사업소장		박미애
	공원운영과장		유병오

양재시민의숲 반려견 놀이터 조성 추진 계획

2022. 2.

시민건강국

(동물보호과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

양재시민의숲 반려견 놀이터 조성 추진 계획

반려견 양육 가정이 늘어나고 반려견 놀이터에 대한 확충 요구도

높아짐에 따라 시민 이용이 많은 도심 공원내 반려견 놀이터(시립)를

조성하여 사람과 동물이 모두 행복한 공존도시 서울 구현

1		추진 배경

□ 근거 법령 : 공원녹지법 시행규칙 제11조

- 반려견놀이터(동물놀이터) : 10만제곱미터 이상 도시근린공원내 설치

□ 시장 공약사항

○ 시장 공약사항(3-3-3) : 반려견놀이터 연차별 확충(~‘25까지 15개소)

□ 필요성

○ 서울 반려견 양육 현황(61만가구) 대비 부족한 반려견 놀이터(現 8개)

- ‘20 서울서베이 결과 전체 가구(389만)의 16% 61만가구, 76만마리 양육

- 서울시 1만가구당 공원 7.5개, 반려견 양육 1만가구당 반려견 놀이터 0.1개

○ ‘21년 시민인식조사 결과 반려동물 양육자 72%가 놀이터 추가 필요 응답

‘21년 서울시 동물보호 시민인식조사 : 서울시 거주 성인 5천명대상 온라인조사, 반려동물 양육자는 999명(전체20%)

- 사유(중복선택): 사회성향상(53%), 시설다양화(46%), 집근처에 없음(44%), 놀이터 붐벼서(22.5%)

○ 기존 市 놀이터(3개소) 이용시민(800명) 대상 설문 결과(‘21년)

- 인접 3개구 주민이용율(74%), 만족도(94.7%), 놀이터 추가조성 건의(50%)

- 만족사유: 목줄 없는 전용공간(57%),사회성증가(24%), 비반려인과 마찰방지(11%)

2		반려견 놀이터 현황

□ 기 조성 현황 : 8개소 (시 3, 자치구 5)

○ 市 반려견 놀이터

구 분	어린이대공원	월드컵공원	보라매공원
설 치 일	’13. 7. 31	’14. 4. 30	’16. 4. 23
위치(면적)	광진구 능동(747㎡)	마포구 상암동(1,638㎡)	동작구 신대방동(1,300㎡)
일평균 이용	약 70명	약 200명	약 240명

○ 區 반려견 놀이터

구 분	도봉구	영등포구	구로구	동대문구	송파구
설 치 일	’17.10.17.	’20.3.16.	’19.12.2.	’20.12.30.	‘21.11.08.
위치(면적)	초안산근린공원 (800㎡)	안양천 오목교 (116㎡)	안양천 오금교 남단 부지 (1,300㎡)	중랑천 장안교 하부 (420㎡)	탄천유수지 (1,221㎡)

□ 반려견 놀이터 위치 현황

	○ ‘22년 조성 진행중 : 3개소 - 市(●) : 양재시민의 숲********** - 區(▲) : 마포구(마포동 36-4, ‘22.4월 개장) 강북구(북서울꿈의숲, ‘22.6월 개장) ※ 기존: 시 3개소(●), 자치구 5개소(▲)

3		추진 경위

□ 관련 부서 협의

○ ‘21.11~12월   : 푸도국 관련 부서와 협의, 추진절차 및 대상공원 파악

○ ‘21.12.15      : 동부공원사업소 방문 협의(공원부지 및 공원심의 관련)

○ ‘21.12.16~17 : 양재시민의 숲, 서울 숲 현장 조사(공원내 대상지 검토)

○ ‘21.12.22~24 : 대상지 결정(양재시민의 숲) 및 추진경과 보고(관계부서)

□ 주민의견 수렴 결과

① 양재시민의 숲 이용시민 현장설문 조사 (‘22.1.6~1.10)

전체 (331명)		반려인(123명)		비반려인(208명)
긍정	부정	긍정	부정	긍정	부정
277명(83%)	54명(17%)	123명(100%)	0	154명(74%)	54명(26%)

② 서초 구민 대상 온라인 설문 조사 (‘22.1.13~1.20)

전체 (304명)		반려인(208명)		비반려인(96명)
긍정	부정	긍정	부정	긍정	부정
255명(84%)	49명(16%)	197명(95%)	11명(5%)	58명(60%)	38명(40%)

4		세부 추진 계획

□ 대상부지 : 양재시민의 숲 공원 內 (약750㎡)

□ 조성내용

○ 조성방향 : 양재시민의 숲의 울창한 수목과 조화롭게 친자연적인  반려견 놀이터로 조성

○ 시설내용 : 중소형견·대형견 놀이터, 휀스, 출입문, 관리소 등

공원내 위치도	놀이터 부지 현장
반려견 놀이터 조성후 모습(예시)

□ 추진방법

○ 주관부서 : 시민건강국(동물보호과)

- 공원조성 변경 심의 준비, 반려견 놀이터 설계 및 공사 추진

**************************

*************************************

**********************************

***********************

□ 추진계획

○ 추진 흐름도

설문조사 (1월)		기본설계용역 (2월)		도시공원위원회 심 의 (3월)		실시설계용역 공사발주 (4월)		착공 및 준공 (5월~7월)

○ 세부일정 및 내용

구분	추진기간	추진내용
주민의견수렴	‘22.1.6.~1.20.	설문조사(온•오프라인) 기완료 -대상인원 : 635명 (83%긍정)
기본설계용역	‘22.1월 ~ 2월	기본설계 및 감독 진행중
입안관련협의	‘22. 2. 10 ~ 2.11	상정안건 사전검토 진행중
의견청취 열람공고 (14일간, 시보 게재)	‘22. 2. 17. ~3. 2.	공원변경조서, 조성계획도
도시공원위원회	‘22. 3. 15.	공원조성계획 변경심의
공원조성계획결정 및 고시 (시보 게재)	‘22. 3월 말	결정고시 및 결정내용 통보
실시설계용역	‘22. 4월 초	실시 설계 및 감독
실시계획작성 및 공람공고 (14일간, 시보 게재)	‘22. 4월 중	공사설계서 공람공고
****	*********	****************
*********	***********	****
공사완료 공고 (시보 게재)	‘22. 7월

	도시공원위원회 심의 개요
❖ 위원회 구성 ► 위원 29명 이내 (시의원 3명, 행정2부시장, 푸른도시국장, 공원녹지 전문가) - 위 원 장 : 행정2부시장 - 부위원장 : 위원 중에 호선 (위원장 직무대행 가능) ❖ 심의일정 : 월1회(매월 3째주 예정) ❖ 심의기준 ► 도시공원·녹지의 유형별 세부기준 등에 관한 지침(국토교통부훈령, 2021.8.5.) 등 *****************************************************

□ 소요예산 : ******

○ 소요내역 : ********************

○ 예산과목 : 시민건강국 동물보호과, 선진형 동물보호시스템 구축,

동물보호 및 복지수준 향상, 반려견 놀이터 조성(전환사업),

시설비 및 부대비, 시설비.  끝.