투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	월드컵대교 건설공사 현장대리인
(경유)
제목	수정예정공정표 조건부 승인 알림-월드컵대교 건설공사

1. 삼건(월드컵)2022-513호(2022. 7. 6)와 관련입니다.

2. 우리본부와 도급계약 체결되어 사업추진중인 「월드컵대교 건설공사」의 안양천 내 수해예방기간 유수장애시설물 철거요청에 따른 남단 연결램프 공사의 수정공정 제출건에 대해 내용 검토 결과 동절기는 기 공정계획 수립 시 검토된 내용으로 본 사안과 관련이 없는 것으로 판단하여 당초 요구한 18개월 연장건을 14개월 연장으로 조건부 승인하고자 함을 알려드리며,

3. 본 조건사항에 대해 이견이 있을 경우 22. 8. 5. 한 회신하여 주시기 바라며 기한 내 회신이 없을 경우 계약관련 후속조치를 하고자 하오니 이 점 양지하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조동협		토목총괄과장	전결 08/01
김태중
협조자	주무관	조재근
시행	토목부-27989	(	2022.08.01	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2543	/전송	02-3708-2599	/	yerom@seoul.go.kr	/	대시민공개