문서번호	시설보수과-22991
결재일자	2022. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	관리과장
정종영		안종필	08/02
			백선호
협 조

악취포집설비 설치공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

「악취포집설비 설치공사」실정보고

우리센터에서 추진 중인 악취포집설비 설치공사 관련, 공사감독기관(서울시설공단)으로부터 실정보고 건이 제출되어 이에 대한 조치계획 보고임.

1	관련근거

□ 실정보고 승인요청[공사감독3처-6406호, 2022.7.27.]

2	공사현황

□ 사 업 명 : 악취포집설비 설치공사

□ 사업내용 : 분뇨처리시설, 농축기동 탈취포집 덕트 및 부속설비 1식

□ 공사기간 : 2022.5.11. ~ 8.18.

□ 계약금액 : 466,922,440원 (디케이건설 대표 김동식)

3	실정보고 내용

□ 현장 여건에 따른 소요물량 변경

위 치	주요내용	사 유	비고
분뇨처리시설	덕트물량 물량 변경 (150~250A) - FRP 덕트 → 후렉시블 덕트로 대체	기기 간섭현상 해소 및 유지관리 편의 확보
	부족분 설계물량 반영 - FRP(700A)덕트 및 후드 연결부 플랜지	현장 여건에 따른 구간 조정 등에 따라 물량변경

□ 공사비 변경                                                                          (단위 : 원)

※ 상기 내용은 개략적인 물량과 금액이며, 시공중 발생되는 일부 경미한 사항은 설계변경시 반영조치

구 분	주요내용			비고
	당초	변경	증/감
도급비계	466,922,440	485,611,012	증18,688,572
공급가액	424,474,946	441,464,557	증16,989,611
부 가 세	42,447,494	44,146,455	증1,698,961

4	조치계획

□ 설계변경을 위한 공사현장 실정 검토보고 건에 대해 승인

○ 최적 품질확보를 위해 현장 여건에 따라 변경 적용된 물량 증·감 등에 따른 검토보고건은 적정하다고 판단되어 추후 설계변경시 반영 조치

□ 공사감독기관(서울시설공단)에 승인결과 회신

붙임 1. 실정보고 승인요청

2. 실정보고 제1회 검토보고 1부.  끝