더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2022년 북악산근린공원 조성사업 설계변경 시행

1. 서울시설공단 공사감독3처-6467(2022.7.28.)호와 관련입니다.

2. 우리구에서 발주하고 서울시설공단에서 공사감독 수행중인『2022년 북악산근린공원 조성사업』에 대한 아래와 같이 설계변경 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 북악산근린공원 조성사업

나. 공사기간 : 2022. 3. 14. ~ 2022. 9. 9.

다. 도 급 액 : 금653,693,130원

라. 시 공 사 : ㈜아이포조경건설 대표 박주은(중랑구 공릉로2길 60 3층, ☎02-6213-1395)

마. 감독기관 : 서울시설공단(공사감독3처)

바. 설계변경사유 : 현장 여건 반영에 따른 물량 변경, 제경비 정산 등(※ 설계변경내용 참조)

사. 도급비 증감내역                                                        (단위 : 원)

구 분	금 액		증 감
	당 초	변 경
도 급 비	금653,693,130원	금776,933,000원	증 123,239,870원

아. 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원확충, 도심공원 확충, 생활밀착형 공원

조성, 시설비및부대비, 시설비(시비)

붙임  설계변경사유서, 관련 공문, 변경내역서, 제비율 검증표 각 1부.  끝.

주무관							김남주				공원기획담당					김성기					공원녹지과장					김성기					도시관리국장						이창구
부구청장							08/02 신상철
협조자				계약담당							신정경					재무과장							강은주
시행			공원녹지과-16806										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3663							/전송			02-2241-6565					/	01024206765@sb.go.kr													/	대시민공개