문서번호	시설과-24024
결재일자	2022. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장		관리부장
김성현	代김성현	문석기		08/03
				이이동
협 조
	주무관		정영권
	주무관		김태우
	주무관		김병수

2023년 서울대공원 전력시설물 유지관리 계획

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 서울대공원 전력시설물 유지관리 계획

대공원 내 안정적인 전력공급을 위하여 전력시설물에 대한 체계적인 보수·정비를 실시하고자 2023년 전력시설물 유지보수 예산 확보에 대한 계획을 보고드림

1		설비현황

전력설비 현황

○ (특)고압 전력설비(주변전소) : 수전전압 22.9㎸ 수전용량 5,000kVA

○ 발전설비 : 주변전실 6.6㎸ 2,000kVA, 동물병원 25kVA

○ 고압 전력설비(2차,3차 지구 변전실) : 종관소 등 6.6㎸ 15개소

○ 저압 전력설비(건물내 전기실) : 호주관 등 33개소

○ 옥내 부하설비 : 건물 89개동 각종 조명설비 및 분전함

○ 옥외 부하설비 : 가로등 854본(1,218등) 및 각종 분전반

2		추진방향 및 실적

○ 전력시설물 점검에 따른 자체정비 불가사항에 대하여 개보수공사 시행

○ 전기안전사고 및 민원발생 우려 시설 정비를 통한 공원이용객 안전성 확보

○ 노후된 전력케이블 및 전력설비 정비로 전기화재 등 안전사고 예방

○ 노후시설 개선사업 추진실적(최근5년)

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계		*********	*******	*******	*******	*********
공원시설물 유지보수 및 정비	전기시설물정비	*******	*******	*******	*******	*******
	전력케이블 및 수전설비 정비	*******	*******	*******	*******	*******
	노후 발전기 교체	*	*	*	*	*******
	노후 공원등 교체	*	*	*	*	*******

3		추진계획

전기시설물 유지보수 공사(동물원 내·외 노후시설 연간단가)

○ 대    상 : 대공원 내 전력시설물

○ 추진기간 :‘23. 1. ~ 12.

○ **************

■ 세부사업 계획

(단위 : 천원)

사업내용	사업필요성	소요예산(안)
******************	************************* ************	*******

○ 추진계획

-‘23. 1. : 설계 및 공사발주

-‘23. 2. : 계약 및 착공

-‘23. 2. ~ 12. : 공사시행 및 준공

동양관 외 4개소 노후 간선 교체공사

○ 대    상 : 대공원 내 전력시설물

○ 추진기간 :‘23. 1. ~ 12.

○ **************

■ 세부사업 계획

(단위 : 천원)

사업내용	사업필요성	소요예산(안)
*********************	*************************	******
************	********************	******
*******************	********************	******
*****************	********************	******
*****************	********************	******

○ 추진계획

-‘23. 1. : 설계 및 공사발주

-‘23. 2. : 계약 및 착공

-‘23. 2. ~ 12. : 공사시행 및 준공

전력케이블 및 수전설비 정비

○ 대    상

- 대공원 내 전력 간선 케이블, 수·배전 설비, 원격감시시스템 구축

○ 추진기간 :‘23. 1. ~ 7.

○ **************

■ 세부사업 계획

(단위 : 천원)

사업내용	사업필요성	소요예산(안)
**************	************************** **************************************	*******
*****************	*************************	******
***************** *******	*********************************	******
************ ******************	************************** ****************************	******
************** ********************	************************** ***************************	******
************** **************************	************************** ***************************	*******
***		******
***		******

○ 추진계획

-‘23. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계

-‘23. 4. : 공사발주, 계약 및 착공

-‘23. 5. ~ 7. : 공사시행 및 준공

전력설비 원격감시시스템 구축[신규사업]

○ 대    상 : 대공원 내 전력시설물

○ 추진기간 :‘23. 1. ~ 7.

○ **************

■ 세부사업 계획

(단위 : 천원)

사업내용	사업필요성	소요예산(안)
**********************	**********************************************	*******

○ 추진계획

-‘23. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계

-‘23. 4. : 공사발주, 계약 및 착공

-‘23. 5. ~ 7. : 공사시행 및 준공

서울대공원 노후 공원등 교체

○ 대    상 : 대공원 내 노후 공원등(대형주차장 구간)

○ 추진기간 : ‘22. 1. ~ 7.

○ **************

■ 세부사업 계획

(단위 : 천원)

사업내용	사업필요성	소요예산(안)
***************	**********************************	*******

○ 추진계획

- ‘23. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계

- ‘23. 4. : 공사발주, 계약 및 착공

- ‘23. 5. ~ 7. : 공사시행 및 준공

지하구 시설물 정비(지하구 접지 시설·조도 개선)

○ 대    상 : 대공원 내 전력시설물

○ 추진기간 :‘23. 1. ~ 7.

○ **************

■ 세부사업 계획

(단위 : 천원)

사업내용	사업필요성	소요예산(안)
*****************	*********************** **********	*******
*************	************************* ******************	******
***		******
***		******

○ 추진계획

-‘23. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계

-‘23. 4. : 공사발주, 계약 및 착공

-‘23. 5. ~ 7. : 공사시행 및 준공

4		예산현황

○ *****************(▶ ‘23년 본예산을 편성·확보하여 추진)

- 전기시설물 유지보수공사(연간단가) : ******

- 전기시설물 정비 : ******

- 전력케이블 및 수전설비 정비 : ******

- 전력설비 원격감시시스템 구축 : ******

- 서울대공원 노후 공원등 교체(대형주차장 구간) : ******

- 지하구 시설물 정비(지하구 접지 시설·조도 개선) : ******

끝.