등록번호	안전치수과-14331		주무관		치수팀장		안전치수과장		안전건설교통국장
등록일자	2022.8.4.
			박강현		서재영		시희식		08/04 代조봉기
결재일자	2022.8.4.
공개구분	부분공개(5)
			협 조
『2022년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)』 공사설계변경(제1회) 검토보고

서 대 문 구

안전치수과

공사 설계변경(제1회) 검토 보고

[2022년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가))

우리 구에서 시행중인 「2022년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)」와 관련하여 설계변경 검토사항이 있어 아래와 같이 검토 보고함.

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 2022년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)

□ 공사기간 : ‘22. 03. 22. ~ ’22. 12. 10.

□ 공사규모 : 빗물받이 준설 19,450개소, 연결관 준설 500개소

□ 사 업 비 : 금300,057,930원

- 도급비 : 300,057,930원

□ 시 공 사 : ㈜신우네이처 대표 김동진

Ⅱ		추진 경과

□ 2022. 2. 21. : 공사발주

□ 2022. 3. 22. : 공사착공

□ 2022. 3. 24. ~ 7.28. : 작업지시(1~5차)완료 (공정율:90%)

- 1차 작업지시 : 간선도로 빗물받이 준설

- 2차 작업지시 : 이면도로 빗물받이 준설

- 3차 작업지시 : 간선도로 및 연세로 일원 저지대 빗물받이 준설

- 4차 작업지시 : 이면도로 및 대형공사장 주변 빗물받이 준설

- 5차 작업지시 : 이면도로 및 역사주변 중점관리지역 빗물받이 준설

Ⅲ		관련규정

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제114호(2020.6.10.)

Ⅳ		설계변경내용

□ 설계변경 사유

○ 장마철 지속적인 집중호우로 주요 도로 및 저지대 빗물받이에 잦은 준설토 퇴적 및 민원이 발생하고 있으며, 풍수해 대책기간 및 가을철 우기기간    지속적인 정비가 필요

○ 재난관리기금(구비) 사용계획 및 심의결과 원안가결을 통해 정비예산을 추가 확보하였으며 이에따른 공사비 증액 및 단순물량 증가

□ 주요 물량변경(증·감) 대비표

공 종	단위	당 초	변 경	증・감	비고
◎빗물받이 및 연결관 준설
인력준설(1호)	개소	350	700	증) 350
인력준설(2호)	개소	100	150	증) 50
횡단빗물받이 인력준설	m	150	250	증) 100
흡입식준설(1호)	개소	10,000	20,800	증) 10,800
흡입식준설(2호)	개소	9,000	11,000	증) 2,000
흡입식준설(횡단빗물받이)	m	100	200	증) 100
연결관세정	개소	500	800	증) 300

□ 설계변경(제1회) 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증 ․ 감		비고
				변동	금 액
총공사비	원	300,057,930	500,057,930	증)	200,000,000
도 급 비	원	300,057,930	500,057,930	증)	200,000,000
이설비및기타	원	-	-		-

Ⅴ		검토 의견

□ 상기와 같은 사유로 설계변경(제1회)을 시행하고자 함.

붙임 : 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경(제1회) 내역서 1부.

3) 제비율 검증확인서 1부.
4) 재난관리기금 사용계획 1부.
5) 제3차 서대문구 재난관리기금 심의결과 보고 1부.  끝.