문서번호	기전과-24429
결재일자	2022. 8. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
오태환		08/04
		김형집
협조

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

강서도로사업소

[기  전  과]

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 실정보고사항 검토보고

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)와 관련하여 책임감리가 제출한 실정보고에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함

□ 관련근거

○ 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 실정보고서 제출

[문서번호 : 대영GE22A-08-02호(22. 08. 02.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

○ 공사위치 및 내용

- 양천구 서부트럭터미널 교차로 : 신호등주 이설 2본(좌회전 1개 차로 추가)

○ 계약금액 : 25,930,000원

○ 공사기간 : 2021. 11. 19. ~ 22. 10. 17.

○ 계약업체 : 광일이엔씨(주) 대표 김현실

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 실정보고 내용

○ 도급비 세부내역 : 감 949천원

- 직접비 : 감 305천원

· 제어기 노후로 인한 안전 및 미관상의 문제로 제어기 및 LSU 교체 물량 추가

· 현장조사 결과 제어기 이설 시 횡단보도 내에 위치하게 되므로 보행자의

통행 및 안전을 고려하여 기존 위치에 존치로 인한 기초물량 삭제

· 교통섬 축소로 인한 맨홀 이설이 예상되었으나 현장조사 결과 존치가

가능하여 신호케이블, 관로, 맨홀, 굴착 물량 변경

· 작업 중 음향신호기 고장 물량이 확인되어 교체 물량 추가

· 지중 지장물의 영향으로 기초앙카 제거 물량 변경 및 보도굴착 규격 변경

· 현장조사 결과 맨홀프레임의 노후로 미끄럼 방지를 위하여 교체 물량 추가

- 간접비(간접노무비 및 제경비) : 감 644천원

○ 관급(지급)자재 변경내용

- 교통신호제어기 1대 증가, LSU 2개 증가

※ 상세 내용 및 내역 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 책임감리 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에

따라 작업 시행토록 지시하고 추후 작업완료 보고 시에 정산

○ 제어기 및 LSU는 사업소 보유자재로 지급 후 부족한 예산에 대해서

추후 교통운영과에 추가 배정 요청 및 제어기 조달구매 시행

붙임  2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 실정보고 제출.  끝.