투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(당산초교 교차로 설치 구간 작업지시)

1. 업무지시현장 : 노들로 구조개선공사(장기1차) (주)평산포장건설, 노들로 구조개선공

사(장기1차) 주식회사 도화엔지니어링, 노들로 구조개선공사(장기1차)

하송종합건설(주)

2. 작 성 일 자 : 2022-08-04 20:08:01

3. 지 시 내 용

가. 노들로 구조개선공사 중 당산초등학교 앞 교차로 설치구간에 대하여 아래와 같이 작업지시 하오니 공사 완료를 위한 세부 공정계획을 제출하고, 작업 전 보고하여 주시기 바랍니다.

나. 작업지시 상세

- 내  용 : 휴일 작업지시

- 대  상 : 당산초교 교차로 설치 구간

- 기  간 : 2022. 8. 8. ~ 2022. 9. 3. 내 토요일

- 사  유

1) 당산초등학교 방학기간('22. 7. 23. ~ '22. 8. 24.) 활용하여 교차로 설치 완료 필요

※ 당산초등학교 및 학부모 운영위원회 요청사항(등하교 학생 안전사고 우려)

2) 방학 시작 이후 교통규제심의 변경 완료('22. 8. 2.) 및 8월 초 기상악화(우천)로 인하여 착수가 지연된 바, 기간내 공사 완료를 위해 작업일수 확보 필요.  끝.

주무관	이승훈		교량건설과장	08/05
황윤기
협조자
시행	토목부-28203	(	2022.08.05	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	lsh94@seoul.go.kr	/	대시민공개