문서번호	방재시설부-16876
결재일자	2017.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이병환		조성만	09/27 남궁용
협조	경리과장		최정수
	주무관		송영배

『잠원2빗물펌프장신설공사(자연방류관로)』

설계변경(총차6회, 3차 4회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.9.

도시기반시설본부

방재시설부

-잠원2빗물펌프장신설공사(자연방류관로-강남역 역경사관로)-

설계변경(총차6회, 3차 4회) 검토 보고

『잠원2빗물펌프장신설공사』와 병행 추진 방침에 의하여 시행하고 있는 강남역 역경사관로 개선 부분을 본공사 총차에 반영 설계변경(총차6회)하고, 기 시행중인 자연방류관로 부분 3차분에 대한 정산 설계변경 검토 보고임

□ 관련근거

○ 물재생계획과-8303(`16.6.28) : 강남역 주변 역경사관로 개선방안      검토 보고(설계·시공 일괄 방식 - fast track)

○ 방재시설부-10662(`16.7.10) : 강남역주변 역경사관로 개선 추진 계획

○ 신명건설사업2017-583(`17.9.22) : 설계변경(총차6회, 3차4회)

검토 결과 보고

□ 공사개요

○ 공사명 : 잠원2빗물펌프장신설공사(자연방류관로)

○ 위  치 : 강남구 압구정로 11길 ~ 한강 둔치

- 관로(2□3.0×2.5~1.5m, L=628m), 가동보 1개소, 수문2개소,

신사공원 복구 등

○ 총공사비 및 공사기간

(단위 : 백만원)

구 분	전체(5회)	1차분(준공)	2차분(준공)	3차분(금회)	장 래
총공사비	14,042	1,973	4,422	7,647	-
도 급 비	10,746	1,890	3,644	5,211	-
관 급 비	1,794	83	557	1,154	-
이 설 비	1,502	-	221	1,281	-
공사기간	`13.01.03.~ `18.02.28.	`13.01.03.~ `15.12.31.	`15.01.02.~ `16.03.31.	`16.04.06.~ `17.09.30.	강남역 주변 역경사 관로개선

○ 시공사/감리사 : ㈜에스트건설/신명건설기술공사

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기 투자	2017년	2018년	비고
계	31,145	15,245	11,000	4,900
잠원2 빗물펌프장	18,012	13,012	5,000	0
강남역 역경사관로	13,133	2,233	6,000	4,900

□ 보고내용(설계변경)

【총차분】

○ 본 공사와 병행 시행하고 있는 강남역 역경사 관로 부분에 대하여         설계변경전[설계VE, 건설기술심의, 원가적정성 및 설계변경소(본부)        위원회자문]원가절감을 위한 관련 절차를 이행하고, 그 결과를 총차        설계변경분에 반영한 내용 보고임.

- 주요공정 : 관로(□2.0×3.0m, L=71m), 8번출입구 이설(에스켈레이터           2대, E/V 1대), 지하상가 구조물 철거 및 재설치, 기계설비,

기타 유관기관 지장물(한전, 통신, 도시가스, 수도) 이설 등

○ 설계변경 내역(총차 6회)

(단위:천원)

구 분		당초(총괄5회)	변경(총괄6회)	증·감
1. 잠원2 빗물펌프장 (토목. 조경) 2. 강남역 관로 개선 (토목,조경,기계)	총공사비	14,042,926	24,882,834	증10,839,908
	도 급 액	10,746,059	17,637,736	증6,891,677
	관급자재대	1,794,459	2,042,370	증247,911
	이설비	1,502,408	5,202,728	증3,700,320

※ 예산과목

- 잠원2빗물펌프장 :(2017년, 도시개발특별회계) 치수 및 하천관리,                       수방대책사업, 잠원빗물펌프장 시설용량 증대

- 강남역 관로개선 :(2017년, 일반회계) 치수 및 하천관리, 수방대책사업,                  강남역일대 침수방지----증액부분 해당

【3차 4회분】

○ 잠원2 빗물펌프장 신설공사(3차분)

- 보험료(건강보험료,연금보험료,노인장기요양보험료), 퇴직공제부금비,

건설하도급대금 지급보증서 발급수수료, 건설기계대여대금 지급보증금           발생부분에 대하여 정산분 반영 조치

○ 설계변경 내역(3차 4회)

(단위:천원)

구 분		당 초(3차3회)	변 경(3차4회)	증·감
잠원2 빗물펌프장 (토목. 조경)	총공사비	7,647,794	7,475,344	감172,450
	도 급 액	5,211,939	5,039,489	감172,450
	관급자재대	1,154,529	1,154,529	-
	이설비	1,281,326	1,281,326	-

□ 건설사업관리단 의견

○ 총차 6회 강남역 역경사 관로개선 부분(토목,기계,조경) 설계변경         사항은 관련전문가 자문 결과를 반영한 사항으로 지방자치단체를          당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조에 의거 계약금액 조정이         타당함.

※ 건축공사 부분은 현재 설계변경소위원회 자문이 진행중 이므로 그 결과를        추후 설계변경시 반영.

○ 3차분 설계변경 사항은 공사의 보험료(건강보험료,연금보험료,노인            장기요양보험료) 및 각종 부금을 정산한 것으로 반영 타당

□ 조치계획

○ 상기 건설사업관리단 검토의견과 같이 총차(6회) 및 3차분(4회) 설계      변경 시행 추진하고 건설총괄부(경리과)에 변경계약 의뢰

○ 총차 설계변경 및 계약 완료후 4차분(강남역 관로부분) 발주

붙 임  1. 건설사업단 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 2부.  끝.