문서번호	설비부-5819
결재일자	2018.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		건축설비과장
호정오		전결 05/02 김은덕
협 조
	주무관		백남진

『퇴계로 도로공간 재편사업 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05.

도시기반시설본부

[설  비  부]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부 호정오	요청일		2018년 04월 일
공 사 명	퇴계로 도로공간 재편사업 전기공사
공사개요	공사규모		가로등신설 62본, 가로등 철거 56본, 신호등 신설 1개소, 신호등 개량 4개소, 교통신호감시설비 신설 2개소
	공사기간		2017. 05. 17~2018. 06. 29
	감 리 사		(주)트래픽스
	설 계 사		(주)서우티이씨
	시 공 사		(주)케이비이앤씨
자문 안건명			설계변경 금액의 자문			요청금액		감)305백만원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 - 서울지방경찰청(교통관리과) 변경규제로 가로등 및 신호등 설치 변경 - 퇴계로 남산측(회현사거리~퇴계로2가 지하차도 앞) 토목공정 미시행으로 가로등 설치 제외 - 설계오류 및 현장실정에 맞는 공정의 반영으로 가로등 설치, 신호등 설치, 교통신호감시시설 및 광통신/자가망시설 변경 및 추가
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :

주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 변경규제, 토목공정 미시행 및 설계오류 등으로 가로등 철거내역 등의 물량증감 발생 - 교통신호감시설비 설치 불필요 및 설계오류 등 으로 교통신호감시시스템 신설 내역 등의 물량 증감 발생 - 변경규제 및 설계오류 등으로 제어기 완성품 철거 내역 등의 물량증감 발생 ▪ 물량 증감내역(별첨 설계변경내역서 참조) - 당 초 : 1식 - 변 경 : 1식 - 증 감 : 1식		▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 724,479천원 - 변 경 : 419,029천원 - 증 감 : 감) 305,450천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 가로등, 교통신호감시설비, 신호등
별첨서류	1. 설계변경내역서 1부. 2. 설계변경도면 1부. 3. 변경 관련자료 1부. 4. 감리단 검토보고서 1부.		▪ 공사예정시기 2017년 05월 ▪ 소요관급자재 1. LED가로등기구 2. 가로등 분전반 및 조명제어장치 3. 가로등주 및 암대 4. 교통신호제어기 5. 신호등 및 잔여시간표시기 6. 신호등주 및 부착대

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	퇴계로 도로공간 재편사업 전기공사
계약금액	724,479천원	계약일	2017.05.17	시공사	(주)케이비이앤씨
공사기간	2017.05.17.~2018.06.29.	낙찰율	85.2756%	설계자	(주)서우티이씨
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)트래픽스
공사규모	- 가로등 신설 62본, 가로등 철거 56본 - 신호등 신설 1개소, 신호등 개량 4개소 - 교통신호감시설비 신설 2개소			※ 작성자 : 호정오 (☎ 02-3708-8628)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	1. 가로등 공사 - 변경규제, 토목공정 미시행 및 설계오류 등 2. 교통신호감시설비 공사 - 설치 불필요 및 설계오류 등 3. 신호등 공사 - 변경규제 및 설계오류 등 4. 보험료 등 제경비 5. 광통신/자가망 설계누락		1. 가로등 공사 - 변경, 토목 미시행 및 오류 반영 2. 교통신호감시설비 공사 - 설치 불필요 및 오류 반영 3. 신호등 공사 - 변경 및 오류 반영 4. 보험료 등 제경비 5. 광통신/자가망 누락 반영	감)33,853천원 감)137,833천원 감)43,006천원 감)149,416천원 증)58,658천원
공 사 비	724,479천원		419,029천원	감) 305,450천원
적 용 요 율	낙찰율 85.2756%		협의율(낙찰율) 85.2756%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	공사계약 일반조건 제7철
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-18-3002호(2018.03.30.)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 및 제7절
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	1. 서울지방경찰청(교통관리과) 변경규제 - 남산SK리더스뷰~우리은행 본점 간 현황차로 유지로 토목공정 미시행에 따른 가로등 신설의 관로 및 기초설치 등의 내역 제외 - 회현사거리 교통섬 유지로 신호등 신설 등의 내역 제외 2. 퇴계로 남측(회현사거리~퇴계로2가 지하차도앞) 토목공정 미시행 - 가로등 철거 및 신설 전체 내역 제외 3. 설계오류 및 현장실정에 맞는 공정 반영 - 가로등 설치 내역 등, 신호등 설치 내역 등, 교통신호감시시설 내역 등 및 광통신 /자가망시설 내역 등의 변경 및 추가
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 ☑ 미이행

□ 관련문서

· 서울지방경찰청 교통관리과-16005(2017.06.13.)

· 서울지방경찰청 교통관리과-25176(2017.09.04.)

· 서울특별시 보행정책과-13437(2017.11.22.)

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서울소방행정타운 건립(1단계) 전기공사
계약금액	3,987,610,000원	계약일	2016. 05. 19.	시공사	㈜신호파워텍 외 2개사
공사기간	2016. 06. 01. ~ 2018. 05. 31.	낙찰률	86.747%	설계자	㈜토문건축사사무소 외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜건원엔지니어링 ㈜토문엔지니어링 ㈜건일엠이씨
공사규모	연면적 25,174.81㎡, 건축물6개동(지하2층~지상15층)			작성자	성 호 준

□ 자문안건 설계변경 현황                                                      ( 단위  :　천원 )

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	1. 전력인입 및 수변전설비 설계 오류 2. 지열 MCC(MCP) 및 2차 동력설비 누락 3. 발전기운전반,연도,UPS 간선 및 동력 설계누락 4. 생활관 화장실 비데콘센트 미설계 5. 전동롤스크린 전원 설계누락 6. 조명기구 설계누락 및 오류 7. 저수조 인입 및 소방펌프 용량변경 8. 중앙훈련장 3~6층 전열설비 설계누락 9. 소방법 미일치 및 내역 누락 10. 공동구 콘센트 설계 누락 11. 제,경비(VAT포함)		1. 설계사 설계검토요청 회신내용 반영 2. 지열 MCC(MCP) 및 2차동력설비 누락분,제어반 간선변경및 추가 3. 발전기운전반,연도,UPS 간선 및 동력 설계누락반영 4. 생활관 화장실 비데콘센트 추가반영 5. 전동롤스크린 전원 설계누락분 반영 6. 조명기구 설계누락 및 오류분 반영 7. 소방펌프 용량 변경에 따른 배관,배선 반영 8. 중앙훈련장 3~6층 전열설비 설계누락분 반영 9. 소방법 미일치 및 설계누락분 반영 10. 공동구 관련법에 따라 설계누락분 반영 11. 제,경비(VAT포함)	증) 4,914 증) 23,459 증) 16,134 증) 5,836 증) 18,242 증) 29,763 증) 2,408 증) 16,828 증) 42,147 증) 3,448 증) 23,601
공 사 비	3,987,610		4,174,390	증) 186,780
적 용 요 율	낙찰률 86.747%		낙찰률 86.747%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자 ☑ 건설사업관리단
협의율 적용 근거	신규비목 적용단가 : 신규단가 ☓ 낙찰률(86.747%) 적용근거 : 공사계약 일반조건 제7절
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-18-3605
	관련규정	공사계약 일반조건 제6절 및 제7절
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	발주처 요청 사항 및 설계도서누락, 오류, 상호모순 등
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 실정보고 승인 – 도시기반시설본부-18-3605

- 소방재난본부 소방행정과-19611호(`17.7.27.), 22856호(`17.9.5.), 29062호(`17.11.10.),

32017호(`17.12.14.), 4176호(`18.2.14.)