문서번호	건축부-15366
결재일자	2019.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	복지시설과장	건축부장
정호기	조영수	09/04 임인구
협 조
	사업기획팀장		김태진

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』

1차 공사기간 연장 검토보고

2019. 9.

도시기반시설본부

건 축 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』

1차 공사기간 연장 검토 보고

「마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사」와 관련하여 건설사업관리자로부터 폭염특보,미세먼지,관급자재 지연등으로 인한 1차수 공사기간 연장 요청이 접수되어 이에 대하여 검토하여 보고함

1		공사개요

공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사

위    치 : 강서구 마곡동 771-1

규    모 : 지하4 지상8층 연면적 21,425.34㎡

지식산업센터(업무시설,근린생활시설)

*****************************************

***********************************************

****************************************

시 공 사 : ㈜신성건설,(주)엔씨종합건설

감 리 자 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소,㈜희림종합건축사사무소

현공정률 : 27%(지하4층 버림콘크리트 타설 진행중)

2		추진경위

‘18.  8. 01: 공사착공

‘18.  9. 10 : 착공식

‘19.  8. 27 : 공사기간 연장요청

3		공사기간 변경 내용

관련근거

- 토희마CM-222호(‘19. 08.27): 마곡산업단지 공공지원센터 건축공사(장기 1차)계약기간 변경 요청

공사기간연장 검토내용

구 분	연장사유 검토			비 고
	해당기간	내 용	적용일수
***	********	********************* *************	**	***
	***********	********************* ********************	**
** ***	***********	********************	**	**
**** ****	************	**************** *************************	**	***
	***********	******************* ************************	**
**** *******	********** ****************	******************** ********************	***	***
	********* ***************	****************** ***************	**
	********************* ****************	************************ ************	***
**	********** *******	********************** *********************	***

공사기간 연장 조정내용

구 분	공 사 기 간			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
**	**********************	**********************	****
**	*********************	***********************	*****

귀책 사유 : 도시기반시설본부

지연배상금 부과 : 미부과

공사비 : 변경 없음

4		건설사업관리자 검토의견

2018년 8월 및 2019년 7,8월에 발생한 폭염특보 및 2019년 1~3월에 발생한 미세먼지, 관급자재 수급지연, 공사로인한 진동 소음피해에 따른 적절한 조치 등으로 64일의 공기연장이 필요함

2019.8월말 기초골조공사 착수 및 지열공사가 마무리되어 골조완료시기(2020년 8월)및 총차공사 준공은 변동없이 가능하다고 판단되므로 1차공사기간 연장에 따른 총차 공사기간 연장없음

5		처리의견

1차 공사의 공사계약기간 연장 승인 요청건은 그 사유가 적정하므로 총차 공사기간 연장 없이 1차공사 기한을 연장하고자 함.

붙임  1. 1차수 공사기간 연장검토 보고(1,2) 각 1부

2. 1차수 공기연장 연장검토(3) 1부(용량 과다로 별도첨부)  끝.