문서번호	기전과-6910
결재일자	2021. 12. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/06 서승완
협조

2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강서도로사업소

[기  전  과]

2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사
실정보고사항 검토보고(2회)

2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 관련하여 책임감리가 제출한 실정보고(2회)에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 실정보고(2회)

(신정이펜시아 3단지 연등 외-유광사 여성병원)

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-12-08호(2021.12.02.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 양천구 구립양천어르신요양센터 앞. 서부트럭터미널사거리,                  강서구 유광사여성병원 앞

○ 공사내용

- 구립양천어르신요양센터 앞 : 신호기(차) 신설

- 서부트럭터미널사거리 : 신호기(차/보) 이설

- 유광사여성병원 앞 : 유턴 신설

○ 계약금액 : 93,841,000원

○ 공사기간 : 2020.6.11. ∼ 2021.12.13.

○ 계약업체 : ㈜초이 대표 최행화

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 실정보고 내용

○ 도급비 세부내역 : 감 2,831천원(93,841천원 → 91,010천원)

- 유광사 여성병원 앞 : 직접비 감 2,078천원

· 준공기한 내에 음향신호기 기능검사 불가로 설치 제외

· 설계오류 P2 지주 보행용 보호금구 제외

· 관급자재에 포함된 조가선은 내역에서 제외

· 교통신호제어기 고재처리 반영

- 간접비(간접노무비 및 보험료 등 제경비) : 감 753천원

※ 상세 내용 및 내역 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 책임감리 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에      따라 작업지시하고 추후 정산물량 반영 설계변경 시행

붙임  2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 실정보고(2회)(신정

이펜시아 3단지 연등 외-유광사 여성병원) 1부.  끝.