문서번호	설비부-27241
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도로설비과장		설비부장
박근형		문학준		08/08
				김호성
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2022. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관련, 건설사업관리단으로부터 현장여건 변경 및 운영자(서경대학교) 요청사항 반영 등에 대한 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	********** *****	**	**************************	*************
		**	**************************	**********
		**	*************************	*************

○ ***********************************

2		관련근거

○ 운영자(서경대학교) 요청사항 반영 요청 [청소년정책과-15502('21.09.15.)]

○ 통합건축T/F회의 개최 결과보고(4차) [건축부-25156('22.06.22.)]

○ 전기공사 실정보고 사항에 대한 검토 보고 [시립CM 제2022-281호 ('22.08.05.)]

3		검토내용

○ 운영자(서경대학교) 요청사항 반영

- 시립청소년 음악창작센터의 효율적인 운영을 위한 건축 실배치 변경에 따른 전기배관,배선 변경 필요

- 건축 인테리어공사 반영에 따른 합주실, 개인실기실, 스튜디오 등 각 실별 용도에 맞는 인테리어 조명등 설치 필요

- 노이즈 방지 및 음향 품질을 위한 음향실 전용 분전반, 접지함 추가 설치 필요

○ 주요 변경내역                                              (단위: 천원)

공 종	변 경 내 용	변 경 사 유	변 경 금 액 (직 접 비)
****	****************** ***************	*********************** *************** *****************************************	*************
****	***************	****************************************	*************
****	************* ***************	******************************** ****************************************	*************
****	****************** ***************	****************************************	*************
****	***************	****************************************	*************
****	************** ***************	****************************************	*************
*******	****************** ***************	*********************** *************** ****************************************	*************
******	***************	****************************************	*************
*************			***********

○ ***************************

구 분	신규단가 적용 근거	비 고
**** *****	****** ******************************** ******************************* **************************************************************** ********************************* ************************************** ****************** **************************************** ********************

○ 관급자재 변경내역                                         (단위: 천원)

품 명	규 격	수 량(개)			변 경 금 액
		당 초	변 경	증·감
***	******	*	*	*********	************
	******	*	*	*********
	********	*	*	*********
	********	*	*	**********
*****	*******	***	***	*********	************
	*******	**	**	*********
	*******	*	**	*********
	*******	**	**	*********
	*******	***	***	*********
	*******	*	**	*********
	*******	**	**	*********
	*******	**	**	*********
	*******	***	***	*********
	*******	***	**	*********
	*******	*	*	*********
********	*******	*	**	*********	************
	*******	*	**	*********
	********	*	***	*********
	*******	*	**	*********

○ 건설사업관리단 검토의견

- 현장여건 및 운영자(서경대학교) 요청사항을 반영하여 변경 시공함이 타당하다고 판단되며, 실정보고에 대한 검토결과 적정함.

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 공사에 필요한 관급자재는 계약부서(총무부)에 변경 구매 의뢰하고자함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.