문서번호	급수운영과-29467
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
손현정	代손현정	성기선		08/08
				代이영미
협 조	시설관리과장		유명은
	시설운영팀장		김형식
	시설관리팀장		정수용
	급수관리팀장		정헌석
	주무관		代이동섭

2022년 장기사용 배급수관(2차분)  정비사업 추진계획

'22년 장기사용 배급수관(2차분) 정비 계획

2022. 8.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

'22년 장기사용 배급수관(2차분) 정비계획

『22년 장기사용 배급수관 정비사업』2차분 예산 배정과 관련하여 이물질, 혼탁수 발생 민원지역과 누수다발구간 중 '84~'85년 매설된 상수도관을 우선정비대상으로 선정하여 배급수관(2차분) 정비사업 추진계획을 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

※『2022년 장기사용 상수도관 정비계획』 누수방지과-12180(2021.12.31.)호

『사업소 담당자 회의 결과 보고』   누수대응과-22970(2022.7.1.)호

『2022년 장기사용 상수도관 정비사업 추진 철저』누수대응과-23565(2022.7.21.)호

Ⅲ		보 고 내 용

□ 22년 장기사용 배급수관 추진현황

○ 정비목표 : 1.5 km (단위사업: 1.293km, 연간단가: 0.207km)            (단위 : m)

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	정비완료	공정률	비고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 2 건		100～300	1,293	1,376	988m	76.4%	7월말 기준
1	월촌초등학교 주변외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사	100~300	688	726	570m	82.8%	급수
2	신월초등학교 주변외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사	150~200	605	650	418m	69.1%	시설

□ 22년 장기사용 배급수관(2차분) 정비 회의 개최 (누수대응과 주관)

- 일    시 : '22. 6. 28.(화) 14:00

- 회의내용 : 2차 사업 예산배정 관련 사고 이월 방지 등 현안사항 논의

- 회의결과

·사고이월을 방지할 수 있는 방향으로 사업소 실정에 맞게 자체 계획을

수립하여 사업 시행

□ 22년 장기사용 배급수관(2차분) 예산 배정 현황

○ 2차분 예산 배정액 : 969백만원 (정비연장 : 0.9km)

○ 본부 회의 결과를 토대로 급수공사(연간단가계약) 계약업체 시행

Ⅲ		추 진 계 획

□ 2차분 정비목표 : 0.9㎞

□ 정비대상 : 덕타일주철관(시멘트라이닝, 무라이닝관)

○ 누수사고 개연성이 높은 '84~'85년 매설관 우선정비(학교 주변 집중 정비)

○ 2세대 상수도관 중 급격한 노후화로 도장재 탈락된 취약 상수도관

□ 사 업 비 : 969백만원

□ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2022. 11. (4개월간)

□ 2차분 사업 예정구간 현황

연번	위 치	기존관 현황				비 고
		구경(㎜)	연장(m)	부설연도	관종
계 : 10 개 구간		80～200	980
1	**********************	**	***	1985	DCIP
2	*********************	******	**	"	"
3	**********************	******	***	"	"
4	*********************	***	**	"	"
5	***********************	***	**	"	"
6	********************	***	***	"	"
7	*********************	***	***	"	"
8	**********************	**	**	"	"
9	*********************	**	***	"	"
10	*******************	**	***	"	"
	이하여백

****************************************************

*********************************************

******************************************

**********************************************

Ⅳ		행 정 사 항

□ 중점 추진사항

○ 철저한 현장조사 및 공정관리, 품질관리 철저

- 교통현황 및 지하매설물에 대해 세밀한 현장조사 실시

- 구간별 도로굴착 승인, 단수 홍보, 제수밸브 조절 등 공정관리 철저

○ 공사 예정지역의 잠재적 민원 사전 예측 및 해결방안 마련

- 수질민원, 야간공사 예정지역에 대해 공사 초기단계부터 안내문 부착, 홈페이지 공지 등을 통한 충분한 대시민 홍보 시행

○ 공사장 안전사고 예방을 준수하며 지속적인 공정관리로 연내 완료토록 추진

붙임 : 1. 2022년 장기사용 상수도관 정비사업 추진 철저(본부, 공문) 1부.

2. '장기사용 배·급수관 정비공사' 추진 관련 회의결과 보고서(본부) 1부.

3. 2차분 추경사업 현황 1부.   끝.