문서번호	시민활동지원과-21963
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시민활동지원과장	총무부장
전승곤	진성수	08/08
		송영민

광나루 레이싱경기장 전면 보수 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

'22. 8.

총 무 부

(시민활동지원과)

광나루 레이싱경기장 전면 보수계획(안)

광나루자전거 공원내 시설 노후화로 인한 안전사고 우려로 운영이 중단된 레이싱경기장 전면 보수를 통해 이용자의 안전 확보 및 자전거 이용 활성화에 기여

1		현황

□ 시설개요

○ 위    치 : 강동구 천호동 481-9 일대(광나루한강공원 내)

○ 규    모 : 면적 9,200㎡(폭 6~8m, 길이 370m)

○ 이용방법 : 무료(단체 4시간 이용 5만원)

준공도면	조감도	레이싱경기장 전경

□ 운영실태

○ 경기장 출발대 파손 및 트랙 일부 훼손 안전사고 우려 잠정 운영중단 상태

○ BMX 경기를 즐기는 동호회 및 시민들로부터 시설 재개방 요구

2		필요성

□ 시설노후화로 운영 중단된 경기장 시설 전면보수 조속한 정상화

○ 수차례 침수 여파로 제 기능을 상실한 철제구조물 출발대 철거 및 재설치

- 컴프레셔 고장으로 출발대 기능 상실, 계단 구조물 내구성 약화 등 안전 취약

작 성 자	총무부장 : 송영민 ☎706 시민활동지원과장 : 진성수 ☎0766 담당 : 전승곤 ☎0771

○ 경기장 안전주행 확보 위한 변형된 트랙 재구조화 및 아스팔트 포장

- 시멘트 등으로 땜질 보수하여 트랙 상부 모서리 각이 져 주행시 크랭크 또는 페달이 걸리는 사고위험 상존

출발대 부식 등 노후화	트랙 경사면 변형	예시(난지 MTB 출발대)

□ 경기장 운영중단으로 시설물 관리에 대한 부정적 시민 인식 개선

○ 시설물 운영중단으로 인해 경기장을 이용하고자 하는 시민 불만 제기

○ 한강 자전거공원 이용 활성화 위한 레이싱경기장 조속한 정상 운영

3		보수계획(안)

□ 보수공사 개요

○ 기    간 : 2023. 3~4월(2개월)

○ 공사범위 : 출발대 재설치 및 트랙 아스팔트 포장 등

- 기능 상실 철제구조물 출발대 철거 및 콘크리트 구조물 출발대 재설치

- 변형된 일부 구간 재구조화 및 트랙 (370m) 아스팔트 전면 포장 등

○ 소요예산 : 115백만원(시설비 108백만원, 실시설계비 7백만원)

□ 예산확보방안 : 2023년도 본예산 편성 요구

4		기대효과

□ 노후된 경기장 전면보수로 이용시민 안전사고 예방 및 만족도 제고

□ 레이싱경기장 운영 정상화로 한강 자전거공원 이용 활성화 기여