문서번호	물재생계획과-26691
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	08/08
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (구로구)

2022. 08.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (구로구)

「고척동 중앙로 주변 하수관로 개량공사」추진중 사업 구간내 지장물(도시가스) 저촉, 건설폐기물 수량 증가 등 설계변경 사항 발생에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 공 사 명 : 고척동 중앙로 주변 하수관로 개량

○ 사업규모 : 하수관로 개량 D300~600㎜, L=974m

○ 공사기간 : 2022. 3. 31. ~ 10. 26.

○ 총사업비 : ***********

○ 발주현황                                                         (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	********** *******	*********	*******	*******	*****	******
					****	******
					**	*******

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 공사구간내 지장물(도시가스) 저촉 및 건설폐기물 수량 증가

- 사업규모 : 도시가스 D200㎜ 2개소

기존 포장깨기 및 건설폐기물 수량 증가 1식

- 소요사업비 : ***************************

Ⅳ		검토 의견

○ 사업 구간내 지장물(도시가스) 저촉, 건설폐기물 증가 등의 설계변경 발생으로 인해 공사비가 증가된 사안으로, 본 공사의 낙찰차액을 사용하여 신속하게 정비함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정*********

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
*	********** *******	*********	*******	******	*****	******
					****	******
					**	*******

- ****************************** 재배정

붙임 : 1. 관련공문 각 1부.

2. 지장물 이설비 1부.  끝.