실정보고 검토서

(매헌지하차도 과천화훼단지앞 볼라드 설치건)

공 사 명

강남순환도시고속도로 건설공사(8공구)

공사개요

· 위    치 :  과천시 주암동~강남수서동

· 사업기간 : 2002.7.3. ~2021.12.31.

· 총사업비 : 3,460억원

· 시공사 : 롯데건설(주) 외1개사

· 감리단 : (주)동명기술공단

실정보고 건명

매헌지하차도 시점부 역U형 볼라드 설치 검토건

실정보고 사유

매헌지하차도 시점부 과천화훼단지 구간 보도블럭 최종보도 복구중 보도블럭 시공에 대한 과천화훼단지측의 차량 진,출입 불편 민원사항이 있어, 이를 보도경계부 역U형 볼라드 설치로 변경하고자 함.

[동기강2022-223호(2022.7.25.)]

건설사업관리단

검토의견

당초 매헌지하차도 시점부 과천화훼단지 구간 최종보도 복구는 당초 보도블럭으로 설계되어 있으나, 조합측의 민원요청사항인 역U형볼라드 설치는 보행자 안전확보 및 가로등주 차량충돌 방지예방을 위해 설치함이 타당하다고 사료됨.

공기에 미치는 영향

(     )  개월

변경(안)

**	***	**	*******
**	*	****************** ********************** ** *********************	****************** ********************** ** *********************
**	*	********	***********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ● )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

발주처

검토의견

과천화훼단지 차량 진,출입 불편민원 해소 및 보행자 안전확보 등 기포장된 아스콘 보도 경계부에 역U형 볼라드 설치를 반영하여 시공코자하는 책임건설사업관리기술인의 검토보고는 타당하다고 판단됨.

비 고

결재

주무관

노승환

도시고속도로과장

김동현

토목부장

08/08

하현석

협조

주무관

박희정