문서번호	토목부-28316
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		代김광호	08/08
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(법면 보호공 설치) 검토 보고

2022. 08.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(법면보호공 설치) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 수방대비 법면 보호공 설치 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

○ 보행교 실정보고 검토보고(보행교 수방기간 하천사면보호) - 창동상계 제22-151호(`22.08.04.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.12.02.)

○ 도 급 비 :  *************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 실정보고 검토

◆ 수방기간 제방 법면보호공 설치

- 수방기간 중랑천제방 안전성 확보를 위한 법면 보호공 설치

·******************

○ 추진경과

- `22.04.22. : `22년 수방대비 주요공사장 합동점검 실시(하천관리과)

- `22.04.25. : `22년 수방대비 주요공사장 합동점검에 따른 수방대비 조치계획서

제출 요청 (도기본-22-4690)

- `22.04.29. : 수방대책 계획서 제출(청광 제22-66호)

·수방기간 도래 전 하천내 공사용 시설물철거 등 하천 원상복구

·제방 법면보호공(야자매트) 설치

A1 법면 보호공 설치	A2 법면 보호공 설치

○ 공사비 증·감 내역

(단위 : 천원)

공 종 명	당초	변경	증⦁감(-)	비 고
********		*
***********	*	******	******
***********	*	******	******	*
***********	*	******	******	*
*****	*	******	******	*
******	*	*****	*****	*
*****	*	******	******	*

○ 물량 증·감 내역

공 종 명	단위	당 초	변 경	증·감(-)	비 고
*********	*	*	*	*	*
************	*	*	*****	*****	*

○ 신규단가 협의

- 협 의 일 : `22.08.04.(목)

- 참 석 자 : *****************************

- 협의결과 : ***************

***	******	******	****
***** **********	********* ***********	*********** **	************ ***************

□ 검토결과 및 조치계획

○ 건설사업관리단 실정보고 검토내용은 적정한 것으로 판단되며 향후

설계변경시 반영하고자 함

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고 검토 보고서 1부. 끝.