문서번호	토목부-28315
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		代김광호	08/08
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(교통안전시설 및 법면보호시설 설치)검토 보고

2022. 08

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(교통안전시설 및 법면보호시설 설치)검토 보고

『창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사』교통 및 보행자 안전

시설 및 법면보호시설 설치 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

1		근 거

○ 보차도교 실정보고 검토보고(보차도교 A1인접도로 보행자보호시설 설치) - 창동상계 제22-147호('22.07.28.)

○ 보차도교 실정보고 검토보고(보차도교 수방기간 하천사면보호공 설치) - 창동상계 제22-146호('22.07.28.)

2		공 사 개 요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.11.22.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

3		실정보고 검토

○ A1측 교통 및 보행자 안전시설 설치

- A1기초공사 시공을 위한 인접도로 지장물(교통신호등 외)이설관련 유관

기관(도봉구청,도봉경찰서) 협의에 따른 교통 및 보행자 안전시설 설치

○ 수방기간 제방 법면 보호시설 설치

- 수방기간내 중랑천 제방 법면 및 배후도로(동부간선도로, 마들로) 안전성

확보를 위한 법면 보호시설 설치

□ 추 진 경 과

○ A1측 교통 및 보행자 안전시설 설치

- `22.02.01.~`22.02.28. : A1측 지장물(교통신호등 및 횡단보도등) 이설 협의

- `22.03.15. : 신호기 이설관련 검토결과 통보(도봉경찰서 경비교통과-229)

·공사중 방호벽 및 안전시설물 설치

- `22.03.24. : 신호기 이설 협의공문발송 (도기본→서울시경찰청)

·교통안전시설물 개선설치 검토요청

- `22.04.08. : 공사 중 교통처리계획 변경통보(서울시경찰청 교통관리과-7566)

·신호기 이설 및 공사 중  교통처리계획 허가

- `22.04.25. : 교통안전 및 보행자 안전시설 설치

보행자통로 및 휀스설치	보행자통로 및 휀스설치

○ 수방기간 제방 법면 보호시설 설치

- `22.04.22. : 수방대비 주요공사장 합동점검 실시(하천관리과)

- `22.04.25. : 수방대비 주요공사장 합동점검에 따른 수방대비 조치계획서

제출 요청(도기본-22-4690)

- `22.04.29. :『수방대책 계획서』제출 (하웅(창동) 제21-136호)

· 수방기간 도래 전 하천내 공사용 시설물철거 등 하천 원상복구

· A1 토사법면 보호공(부직포+야자매트) 및 A2 가시설(H-pile+

토류벽)방수시트 설치 등

- `22.05.16. : 발주처 현장점검 A2사면 야자매트 추가 시공 지시

A2 법면 및 가시설 보호시설 설치	A1 법면 보호시설 설치

□ 공사비 증·감 내역

○ 교통 및 보행자 안전시설 설치 ***********

(단위 : 천원)

공 종	규 격	당 초	변 경	증·감		비 고
**********	****	***	*****	**	*****	****
*************	***************	***	******	***	******	****
***************	*********	**	*****	**	*****	****
*************	************	**	***	**	***	****
**************	**********	**	*****	**	*****	****
***		**	*****	**	*****
***		**	*****	**	*****	*
****		**	******	*	******	*
*****		**	*****	*	*****	*
****		**	******	*	******	*

○ 제방 법면 보호시설 설치  ***********

(단위 : 천원)

공 종 명	당 초	변 경	증·감	비 고
**********	*	******	******
****************	*	*****	*****	****
**************	*	******	******	****
******	*	*****	*****	****
***********	*	******	******	*
***********	*	******	******	*
*****	*	******	******	*
******	*	*****	*****	*
*****	*	******	******	*

□ 수량 증·감 내역

공 종 명	규 격	당 초	변 경	증.감		비 고
*******************
**********	****	***	********	**	*****	*
*************	*****************	****	******	**	******	*
***************	*********	**	******	**	****	*
*************	************	**	*****	**	****	*
**************	**********	**	******	**	*****	*
*******************
**********	*********	*	***	*	***
****************	************	*	*****	*	*****
**************	************	*	***	*	***
*******	********	*	***	*	***

□ 신규단가 협의

○ 협 의 일 : `22.07.26.(화)

○ 참 석 자 : *****************************

○ 협의결과 : ***************

공 종	시공사(안)	발주차(안)	적 용
법면 보호공	********* ***********	**************	***************************

4		검토결과 및 조치계획

상기 검토결과와 같이 건설사업관리단 실정보고 검토내용은 적정한 것으로

판단되며 향후 설계변경에 반영하고자 함

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고 검토 보고서 각 1부. 끝.