	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	녹번, 역촌119안전센터 외벽 환경개선 공사 변경계약 체결 계획

1. 소방행정과-24737(2022.8.8.)호 "녹번, 역촌119안전센터 외벽 환경개선 공사 준공 및 감리 용역 완수 검사 계획"와 관련입니다.

2. 우리 서 녹번, 역촌119안전센터 외벽 환경개선 공사 미사용 경비 정산을 위하여 아래와 같이 변경계약을 하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 은평소방서 녹번, 역촌119안전센터 외벽 환경개선 공사

나. 계약업체 :

구 분	업체명	대표자	주 소	사업자등록번호	전화번호
**	*********	***	******************	************	***********

다. 계약금액 : 금431,321,000원(금사억삼천일백삼십이만일천원)

라. 계약기간 : 2022. 5. 13. ~ 7. 29.

마. 변경사항 :

계약금액	당 초	******************************
	변경후	******************************
	감 액	**************************
비 고	○ 보험료 미사용 등 경비 정산 감액
계약기간	당 초	*********************
	변경후	변동없음.

※ 감리검토의견 : 경비 증감으로 인한 계약금액 변경은 합당한 것으로 판단 됨.

바. 예산과목 : 은평소방서 소방행정과, 소방행정기반 강화, 직무환경 개선, 소방관서 시설물 유지 보수, 일반운영비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 검토보고서 1부.  끝.

담당자	차영진		장비회계팀장	이재원		소방행정과장	윤기응		소방서장	08/09
김재학
협조자
시행	소방행정과-24809	(	2022.08.09	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)은평소방서 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6021	/전송	02-2187-8210	/	ckdudwls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)