문서번호	시설보수과-23302
결재일자	2022. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	관리과장
정종영		안종필	08/10
			백선호
협 조

악취포집설비 설치공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

「악취포집설비 설치공사」실정보고(2차)

우리센터에서 추진 중인 악취포집설비 설치공사 관련, 농축기동 악취포집배관 일부 변경사항이 발생되어 이에 대한 조치계획 보고임.

1	관련문서

□ 농축기동 악취포집설비 FRP배관 변경요청[운영과-23215, 2022.8.8.]

□ 농축기동 악취포집설비 탈취배관 일부 변경요청[*********401호]

2	공사현황

□ 사 업 명 : 악취포집설비 설치공사

□ 사업내용 : 분뇨처리시설, 농축기동 탈취포집 덕트 및 부속설비 1식

□ 공사기간 : 2022.5.11. ~ 8.18.

□ 계약금액 : 466,922,440원 (디케이건설 대표 김동식)

3	실정보고 내용

□ 현장 여건에 따른 소요물량 변경

위 치	주요내용	사 유	비고
농축기동	농축기 하부 덕트 및 부속자재 변경 (FRP덕트 → 후렉시블 주름관)	장비 유지보수 및 교체시 간섭현상 해소
분뇨처리동	수목이식 공종 제외	자체 시행
	덕트물량 변경(간섭현상 해소 및 구간조정)	1차보고(시설보수과-22991, '22.8.2)

□ 공사비 변경                                                                          (단위 : 원)

※ 상기 내용은 개략적인 물량과 금액이며, 시공중 발생되는 일부 경미한 사항은 설계변경시 반영조치

구 분	주요내용			비고
	당초	변경	증/감
도급비계	466,922,440	482,630,850	증15,708,410
공급가액	424,474,946	438,755,319
부 가 세	42,447,494	43,875,531

4	조치계획

□ 최적 품질 확보를 위한 공사현장 실정보고 건에 대해 승인

○ 기계 수리시 덕트로 인한 간섭현상 최소화를 위해 작업공간 확보 등 현장여건에 따른 물량 증·감은 적정하다고 판단되어 원안대로 승인.

□ 공사감독기관(서울시설공단)에 검토결과 통보

○ 변경사항에 대한 검토결과를 통보하여 공사품질 확보 및 설계변경이 적기에 반영될수 있도록 조치

붙임 1. 농축기동 악취포집설비(FRP배관) 변경 요청 1부.  끝