문서번호	시설과-21925
결재일자	2022. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
임주은	代남광현	08/10
		이상용
협 조

『공원 내 장애인화장실 환경개선공사』

중앙광장 화장실 경사로 설치 관련 실정사항 검토보고

2022. 8.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『공원 내 장애인화장실 환경개선공사』

중앙광장 화장실 경사로 설치 관련 실정사항 검토보고

「공원 내 장애인화장실 환경개선공사 중앙광장 화장실 경사로 설치와 관련하여 법령검토결과 설계내용과 상이한 것으로 판단되어 이에 대한 설계사 검토의견을 받고 이에 따른 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		관련근거

□ 「공원 내 장애인화장실 환경개선공사」낙산공원 매점 경사로 설치 [MAS 20*******01(2022.08.10.)]

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 공원 내 장애인화장실 환경개선공사

□ 공사위치 : 낙산공원 내 화장실 2개소(중앙광장, 정상)

□ 공사내용 : 장애인화장실 개선을 위한 화장실 리모델링 공사

□ 공사기간 : 2022. 7. 28. ~ 11. 24.

□ 공사금액 : *************************************************************

□ 도급업체 : ******************

Ⅲ		법령 검토내용

□ 경사로 설치기준

❍ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙

[별표1] 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준

12. 경사로

다. 손잡이

(1) 경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다.

□ 설계내용 및 현황

❍ 설계내용

****	****
	*****************************************************************************

❍ 중앙광장 화장실 전면 현황사진

현황사진(중앙광장 화장실 전면)

Ⅳ		설계사 검토의견

□ 검토의견

*******************************

***********************************************************************************

******************************************************************

□ 변경도면(안)

Ⅴ		검토결과

***********************************************************************************************************************************

******************************************************************************

Ⅵ		향후계획

□ 경사로 설계내용이 변경됨을 시공사에 통보하여 공사를 추진하고 이를 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 1. 설계사 검토의견 공문 1부.

2. 기존도면 및 변경도면 1부.  끝.