문서번호	한양도성도감-24402
결재일자	2022. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
이성산		代박민상	08/10
			김홍진
협조

전시관리실 재설계에 따른 전기공사 설계변경(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.08

문화본부

(한양도성도감)

전시관리실 재설계에 따른 전기공사 설계변경(안)

「남산 회현자락 한양도성 유적전시관」전시관리실 재설계에 따른 전기공사 변경계약을 추진하고자 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		공사개요

■ 공 사 명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성 전기공사

■ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(43,630㎡)

■ 공사기간: 2019. 03. 26. ~ 2022. 09. 20.

■ 시 공 사: ****************

■ 계약금액: *************

Ⅱ		추진근거

■ 한양도성도감-24388('22.08.09.)호 「유적전시관 전기공사 실정보고 검토서」

■ 한양도성도감-21109('22.4.25)호「현장 유적전시관 조성관련 전기통신 도면 제공 및 계약변경 안내」

■ 한양도성도감-8882('21.10.7)호 「 전시관리실 설계용역 준공보고」

■ 한양도성도감-8144('21.09.09.)호「실정보고 검토서(한양도성 유적박물관 조성 전기공사」

■ 한양도성도감-9507('20.9.18)호「전시관리실 재설계 추진계획」

Ⅲ		변경내용

■ 건축변경

구 분	변경전	변경후	비 고
층 수	지하1층	지상1층	전시관리실 추가 실별 구획 및 위치 변경
용 도	전시 및 관리실	전시 및 관리실
구 조	철근콘크르트	철근콘크르트
연면적	280.42㎡	223.9㎡

■ 변경사유

○ 건물기능 및 유지관리 효율성, 장애인 접근성 향상을 위한 건축물 재설계

○ 건축물 재설계에 따라 전기·통신공사 도면이 전면 변경되었으며, 또한 공사중 공조설비 변경 및 전시분야 요구사항 반영, 가로등 전원공사 추가 등으로 내역이 변경됨

■ 적용단가

○ *****************

○ ******************************************

■ 변경내역: 상세내역은 붙임 2 변경내역서 참조

○ 원가 비교표

구분	변경전(원)	변경후(원)	증감액(원)
재료비	73,182,245	67,926,687	-5,255,558
노무비	94,945,235	105,798,057	10,852,822
경비	22,199,992	23,832,183	1,632,191
***	**********	**********	*******
부가세	19,745,687	20,517,789	772,102
합계	***********	***********	*********

○ 공종별 변경내역

공종		주요내용	금액변경(원)			비고
			변경전	변경후	증감액
인포센터	****	****************** ***************** **************** *****************	*********	**********	*********
	****	******************** *********	*********	*********	*********
	****	******************** ****** *********************	*********	*********	*********
	****	**************** ****************	**********	*********	***********
	*****	******************* ********************	-	*********	*********
옥외공사	**********	******************** ***************** *************************	-	*********	*********

Ⅳ		예산사항

■ 소요예산

도급공사비			비고
변경전	변경후	증감액
************	************	**********

********************************************

■ 예산과목

○ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 시설비및부대비, 시설비

※ 건축담당자와 예산협의 완료함

■ 보고자 의견

****************************************************************************************

********************************************************************************

Ⅴ		향후계획

■ 2022. 08: 변경계약 의뢰

■ 2022. 09: 준공정산 및 준공처리

붙 임: 1. 감리단 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 시공사 합의각서 1부.  끝.